설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부 전병철

요청일

2017년 3월   일

공 사 명

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

공사개요

공사규모

램프신설 : L=1,383M(교량 446M 포함)

램프이설 : L=1,309M(교량 139M 포함)

공사기간

2016. 04. 01 ~ 2020. 03. 05

감 리 사

㈜이산, ㈜천일, ㈜한맥

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 2개사

자문 안건명

상.하수도 시점부 미타입구간 공법변경

(진동해머+Water Jet→진동해머+Auger+T4

요청금액

증) 138백만원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

0설계변경사항(요약)

○ 내용 : 한강고수부지내 상,하수도 이설을 위한 Sheet Pile압입을 진동파일 해머 + Water Jet공법으로 변경하여 시행하고 있으나 시점좌측 일부지역에서 항타가 불가한 실정으로 지반조사를 추가로 시행하여 지반조건과 일치하는 공법인 진동파일 해머 + Auger + T4공법으로 설계변경.

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 가시설 위치 변경 및 현장 지반조사 결과등을 고려할 때 추가 공법면경이 필요한 것으로 판단            되며 공사의 시급성을 고려시 경제성은 불리하나 실제 시공이 가능한 Auger+T4+전동식 진동            파일 해머공법 적용이 필요한 것으로 사료됨.

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증,감
Sheet Pile압입	진동파일해머	본	30	30	-
Sheet Pile압입	Water Jet	본	1,238	1,086	-152
Sheet Pile압입	Auger + T4	본	-	152	152

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :   81백만원

- 변 경 :  220백만원

- 증 액 :  138백만원

▪ 설계변경 주요 공종

- 쉬트파일 압입방법 변경

별첨서류

1. 본부방침서 사본          1부.

2. 감리단 검토보고서 사본  1부.

3. 변경설계내역서 사본     1부.

4. 지반조사보고서 사본     1부.

▪ 공사예정시기

: 2016. 12 ~ 2017. 03

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사
계약금액	26,452,343 천원	계약일	2016. 03. 18	시공사	대보건설(주)외 2개사
공사기간	2016.04.01 ~ 2020.03.05	낙찰율	71.98%	설계자	대한콘설탄트(주)
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	(주)이산 (주)천일 (주)한맥
공사규모	램프신설 : L=1,383M(교량 446M 포함) 램프이설 : L=1,309M(교량 139M 포함)			※ 작성자 : 전병철 (☎ 3708-2568)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증)/감)
변 경 개 요	- Sheet Pile압입(w/j) : 152본		- Sheet Pile압입(Auger+T4) : 152본	- Sheet Pile압입(WJj) : 감) 152본 - Sheet Pile압입(Auger+T4) : 증) 152본
공 사 비	81백만원		220백만원	증) 138백만원
적 용 요 율	전체 낙찰율 71.98%		협의율(85.98%) 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	지방자치단체를당사자로하는계약에관한시행령제74조4조3항
설계변경 근거	방 침	도시기반시설본부-17-1847(17.02.27) : 가시설 공법 변경 승인통보
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⓺공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	한강고수부지내 상,하수도 이설을 위한 Sheet Pile압입을 진동파일 해머 + Water Jet공법으로 변경하여 시행하고 있으나 시점좌측 일부지역에서 항타가 불가한 실정으로 지반조사를 추가로 시행하여 지반조건과 일치하는 공법인 진동파일 해머 + Auger + T4공법으로 설계변경.
효 과	① 공기단축( 월), ⓶ 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⓹ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 올대감17-032(17.02.24) : 실정보고(상.하수도 시점부 미타입구간 공법변경)