설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호

요청부서

토목부 전병철

요청일

2017년 3월   일

공 사 명

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

공사개요

공사규모

램프신설 : L=1,383M(교량 446M 포함)

램프이설 : L=1,309M(교량 139M 포함)

공사기간

2016. 04. 01 ~ 2020. 03. 05

감 리 사

㈜이산, ㈜천일, ㈜한맥

설 계 사

(주)대한콘설탄트

시 공 사

대보건설(주)외 2개사

자문 안건명

Sheet Pile항타공법변경

(진동해머→진동해머+Water Jet)

요청금액

증) 323백만원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순

▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등)

▢ 민원해결, 보수, 보강

▢ 문화재 및 지장물 이설

▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함)

▢ 제도, 기준변경

▢ 유관기관 협의 미흡

0설계변경사항(요약)

○ 내용 : 한강고수부지내 상,하수도 이설을 위한 Sheet Pile압입이 진동파일 해머에 의한 항타공법으로 설계에 반영되어 있으나 지반조건과 일치하지 않아 항타가 불가한 실정으로 지반조사를 추가로 시행하여 지반조건과 일치하는 공법인 진동파일 해머 + Water Jet공법으로 설계변경.

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 자갈(호박돌)층에 시공가능한 항타공법이 필요하다고 사료되며, 공사의 시급성 및 경제성을   고려시 전동식 진동파일 해머 + Water Jet공법이 적정한 것으로 판단됨.

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 변경개요

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증,감
Sheet Pile압입	진동파일해머	본	1,268	30	-1,238
Sheet Pile압입	Water Jet	본	-	1,238	1,238

▪ 공사비 증감내역

- 당 초 :  156백만원

- 변 경 :  479백만원

- 증 액 :  323백만원

▪ 설계변경 주요 공종

- 쉬트파일 압입방법 변경

별첨서류

1. 본부방침서 사본          1부.

2. 감리단 검토보고서 사본  1부.

3. 변경설계내역서 사본     1부.

4. 지반조사보고서 사본     1부.

▪ 공사예정시기

: 2016. 12 ~ 2017. 03

▪ 소요관급자재 : 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사
계약금액	26,452,343 천원	계약일	2016. 03. 18	시공사	대보건설(주)외 2개사
공사기간	2016.04.01 ~ 2020.03.05	낙찰율	71.98%	설계자	대한콘설탄트(주)
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )			감리자	(주)이산 (주)천일 (주)한맥
공사규모	램프신설 : L=1,383M(교량 446M 포함) 램프이설 : L=1,309M(교량 139M 포함)			※ 작성자 : 전병철 (☎ 3708-2568)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증)/감)
변 경 개 요	- Sheet Pile압입(진동해머) : 1,268본		- Sheet Pile압입(진동해머) : 30본 - Sheet Pile압입(W/J) : 1,238본	- Sheet Pile압입(전동식): 감) 1,238본 - Sheet Pile압입(w/j) : 증) 1,238본
공 사 비	156백만원		479백만원	증) 323백만원
적 용 요 율	전체 낙찰율 71.98%		협의율(85.98%) 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	지방자치단체를당사자로하는계약에관한시행령제74조4조3항
설계변경 근거	방 침	⦁도시기반시설본부-16-10375(16.11.30) : 가시설(Sheet Pile항타)설치공사 시행 ⦁도시기반시설본부-16-10887(16.12.13) : 가시설(Sheet Pile항타)설치공사 시행
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⓺공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	한강고수부지내 상,하수도 이설을 위한 Sheet Pile압입이 진동파일 해머에 의한 항타공법으로 설계에 반영되어 있으나 지반조건과 일치하지 않아 항타가 불가한 실정으로 지반조사를 추가로 시행하여 지반조건과 일치하는 공법인 진동파일 해머 + Water Jet공법으로 설계변경.
효 과	① 공기단축( 월), ⓶ 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⓹ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진

□ 관련문서

- 올대감16-111(16.12.12) : 실정보고(Sheet Pile항타구간 지반조사 결과보고)