준공기한 연기 의뢰서

1. 공사개요

○ 용 역 명 : 한강공원 보행잔교 타당성조사 및 기본계획 용역

○ 용역내용 : 타당성조사 및 기본계획 수립

○ 공사기간 : ‘18.11.27.~’19.07.26

○ 계 약 자 : 주식회사 동일기술공사 황주환

○ 계약금액 : 81백만원

2.  위 공사의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2018.11.27. ~ 2019.07.26.	2018.11.27. ~ 2019.10.31.

○ 연기 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 부과여부 : 미 부 과

○ 연기사유

- 한강공원 보행잔교 기본계획 수립을 위한 전문가 자문(한강시민위원, 유관부서 등) 의견수렴 및 반영을 위해 완수기한 연장이 필요함.

2019. 7.

치수과장    손 창 열 (인)

한강사업본부 경리관 귀하