			고병국 의원 (도시계획관리위원회, 더불어민주당)
□ 요구번호 :	1151	번
□ 요구내용
□ 인수동 주택가 공동주차장 건립지원사업 관련(사업부서: 도시교통실 주차계획과) 1) 사업개요 2) 사업 추진경과 및 현황 3) 사업 대상지 감정평가 결과(엑셀로 작성) ※ 첨부파일 서식 참조
1~ 2. 인수동 주택가 공동주차장 건립 지원 사업 관련 사업개요 및 추진 현황 등은 다음과 같습니다. □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2018. 5. ∼ 2021.10. ○ 위 치 : 강북구 수유동 294-29번지 일대 ○ 규 모 : 자주식, 3층4단, 152면 ○ 총사업비 : 12,555백만원 - 시비(70%) 8,789백만원 구비(30%) 3,766백만원 □ 추진현황 ○ 2018. 06. : 도시계획시설(주차장) 결정 및 지형도면 고시 ○ 2018. 06. : 실시설계 용역계약 ○ 2019. 05. : 실시계획 인가고시 ○ 2019. 12. : 토지보상 실시 ○ 2020. 02. : 재결신청(강북구 건설관리과→서울시 토지관리과) ○ 2020. 06. : 재결 통보(서울시 지방토지수용위원회→강북구 건설관리과) ○ 2020. 07. : 재결 협의(강북구 건설관리과) □ 향후계획 ○ 2020. 08. ~ 2021. 10. : 공사 착공 및 준공 3. 사업대상지 감정평가 결과는 개인 정보 등에 관한 사항 등으로 『공공기관의 정보공개에 관한 법률』제9조제1항제6호에 의거 비공개 정보에 해당되어 해당 보상 업무를 수행한 자치구에서 자료를 제출하지 않았음을 양해하여 주시기 바랍니다.
			작성자	기관명 (부서명)	직위	성명
				주차계획과	담당사무관	김재승
				☎2133-2363	담당자	양은범
				작성일 : 2020-8-7