이성배  의원 (도시계획관리위원회, 국민의힘)

□ 요구번호 :

995

번

□ 요구내용

1. 서울로 7017 공사 관련
- 사업개요, 사업목적, 추진배경, 추진경위, 사업세부내용,

예산 편성 및 집행 내역, 사업평가(전문가 및 시민)

□ 사업 개요

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문로 5가 527 ~ 만리동1가 62

○ 공사기간 : 2015.11.11. ~ 2017.11.21.

○ 공사내용

- 교량 보수‧보강, 조경 식재, 편의시설 설치

- 서울역파출소복합화 및 만리동 광장 조성 등

○ 사 업 비 : 64,690백만원

□ 사업 목적

○ 서울역 고가를 시대적 유산으로서의 가치와 의미를 되살려 재활용하여 차량중심에서 사람중심의 보행공간으로 재생하여,

○ 도심부 문화유산, 공원 및 관광명소를 연결함으써 시민이 쉬고 거닐 수 있는 도심의 랜드마크를 조성함으로써 주변개발계획 및 경제 활성화에 기여코자 함.

□ 사업 배경

○ 차도로써 수명이 다한 서울역 고가의 역사적 의미와 가치를 감안 철거하지 않고 재생을 추진함.

○ 시민이 쉬며 거닐 수 있는 사람중심의 보행공간으로 탈바꿈하여 주변지역과 소통의 공간 마련함.

□ 추진 경위

○'14.8.27. : 서울역고가 프로젝트 추진계획안 수립(시장방침)

○'15.1.29. : 서울역 7017 프로젝트 기자설명회

○'15.5.13. : 서울역 7017 프로젝트 국제현상 설계공모 당선작 발표 기자설명회

○'15.7.~'16.8. : 기본 및 실시설계 시행

○'15.11.~12.18. : 관계기관 협의 절차 이행(국토부, 문화재청 등)

○'15.12.13. : 서울역 고가도로 차량 통행금지

○'15.12.26. : 서울역 고가 바닥판 철거공사 시행(~‘16. 8.)

○'16.4.18.  : 보수□보강 및 조경공사 착공

○'16.10.7. : PC 바닥판 설치완료

○'17.1.~'17.4. : 보행길 시공(교량 보수․보강, 조경, 건축, 설비)

○'17.5.20. : 서울로 개장

○'17.12월  : 공사완료

□ 사업 세부내용

구분	공사 내용	비고
토목	고가도로 보수․보강, 그린웨이 조성 등 B=10.3m, L=938m 바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m
조경	고가상부 식재 및 조경시설물 설치, 만리동광장 및 퇴계로교통섬 조성, 교목 670주, 관목 14,138주, 초화류 90,326본, 덩굴류 4,815주, 잔디 1,152㎡ 식재
건축	편의시설 20개소(고가상부 16개소, 고가하부 4개소) 연결시설물 6개소(엘리베이터 5개소, 에스컬레이터 1개소)
설비	엘리베이터 5대, 에스컬레이터 1개소, 안개분수 15개소, 냉난방설비 조명폴 111개소, 경관조명 및 화분 띠조명 4,248m, 장애인음성유도기 16개

□ 사업비 집행내역

○ 공사부분

- 공사비 내역

(단위:백만원)

구 분	총공사비	도급액	관급액	폐기물
총 공사비	45,377	41,150	3,766	461
철거공사	5,206	5,017	8	181
보수공사	40,171	36,133	3.758	280

- 공사기간 : 2015.11.11. ~ 2017.11.21.

○ 건설사업관리용역 부분

- 용 역 비 : 1,855백만원

- 용역기간 : 2015.11.11. ~ 2017.11.25.

○ 설계 용역

- 용 역 비 : 2,610백만

- 용역기간 : 2015.07.01. ~ 2016.08.31.

끝.

작성자

기관명
(부서명)

직위

성명

토목부

담당사무관

진재섭

02-3708-2544

담당자

강대호

작성일 : 2021-6-9