교체장애수전 정비

□ 사업개요

◦ 목    적 : 검정유효기간 도래 등으로 계량기 교체를 하여야 하나, 계량기실 협소·  관 노후 등 장애로 교체가 불가능한 수전을 정비하여, 정확한 계측을 통한 세입증대

◦ 규    모 : 계량기실 정비공사 1,058개소

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월

◦ 사 업 비 : 368,184천원

□ 추진사항

◦ 집행현황                                                  (단위 : 백만원)

사 업 명	예산액 (A)	예산현액 (B)	원인행위액 (C)	지출액 (D)	집행률 (C/B)	비고
교체장애수전 정비	368	368	39	39	10.6

◦  집행내역 : 200개소 정비

※ ‘13년도 집행율 : 84%

□ 상반기 집행 부진 사유

◦ 집행시기 미도래

- 장애 발생시 수시정비(단가계약)하는 사업으로 매 회 정산금이 소액으로 사업소별기성금을 분기 또는 반기 일괄 집행 (하반기 집행예정)

□ 향후 대책

◦ 향후 추진계획

- 교체장애수전 정비 : 약 600개소(하반기)

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 계측관리과장 : 황오주☎1250 담당 : 이상구☎1254

수도계량기 교체 민간위탁

□ 사업개요

◦ 목    적 : 검정유효기간 도래 및 동파계량기 등 교체업무를 민간에 위탁함으로써, 서비스 향상 도모와 조직의 경량화를 통한 업무효율 증대로 경영개선

◦ 규    모 : 소형 수도계량기 교체 - 212,000개소

대형 수도계량기 교체·신설·폐전 - 2,850개

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월

◦ 사 업 비 : 3,671,924천원

□ 추진사항

◦ 집행현황                                                  (단위 : 백만원)

사 업 명	예산액 (A)	예산현액 (B)	원인행위액 (C)	지출액 (D)	집행률 (C/B)	비고
수도계량기 교체 민간위탁	3,672	3,672	930	930	25.3

◦ 집행내역 : 소형수도계량기 교체 - 75,000개

대형수도계량기 교체 – 1,870개

□ 상반기 집행 부진 사유

◦ 계량기 동파 및 폐전물량 감소

-  ‘14년초 겨울철(1월~2월) 기온이 높아 계량기 동파발생 물량 감소

-  재건축, 재개발 등 폐전요인 감소로 계량기 철거물량 감소

◦ 기 교체물량 기성금 미지출 (기존 계약업체 미정산금액 159백만원 7월중 집행예정)

□ 향후 대책

◦ 향후 추진계획

- 만기,신설 등 교체 : 약 8만개(10월말까지 완료)

- 동파계량기 사전교체 : 약 37천개(11월까지)

- 동파계량기 사후교체 : 약 5천개(12월중)

- 고품질계량기 설치 : 약 750개(하반기)

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 계측관리과장 : 황오주☎1250 담당 : 이상구☎1254

행정정보시스템 구축

□ 사업개요

◦ 목    적 : 노후 항온항습기 교체, 상수도 무선통신망 구축 등을 통해 IT기술

환경변화에 대응한 정보 통신서비스 향상 및 행정업무 효율화 도모

◦ 단위사업 내용

(단위:백만원)

사 업 명	사업비	사 업 내 용
노후 항온항습기교체	27	내구연한(9년)이 지난 항온항습기 1대
행정정보화장비구입	703	PC 712대, 모니터 190대, 인터넷전화기 40대
정보보호 노후장비 교체	550	방화벽(FW)장치 14대 *내구연한 5년
상수도 무선통신망 구축	334	본부 및 사업소 등 13개소 무선통신망구축
업무관리 서버자원 증설	144	저장공간(하드디스크) 구매

◦ 사 업 비 : 1,758백만원

□ 추진현황

◦ 예산 집행현황(6월말 현재) : 472백만원(집행율 26.8%)

◦ 추진완료 : 2개 단위사업(조달구매)

- 노후 항온항습기 교체(27백만원), 행정정보화 장비구입(445백만원)

◦ 추진 중 : 3개 단위사업(공개경쟁)

- 정보보호 노후장비 교체 : 7월 계약,  9월 집행예정

- 상수도 무선통신망 구축 : 7월 계약, 10월 집행예정

- 업무관리 서버자원 증설 : 7월 계약, 12월 집행예정(정보화기획단 일괄발주)

□ 집행부진 사유

◦ 정보화사업 관리지침(절차)에 따라 정상추진 중

- 과업지시서 및 제안요청서 검토(정보기획담당관, 4월)

- 보안성검토(정보통신보안담당관 경유 국가정보원, 5월)

- 계약심사(계약심사과, 6월), 입찰공고(재무과, 6월)

* 일상감사(경영감사담당관, 6월)

□ 향후계획

◦ 진행 중인 추진사업 완료

- 정보보호 노후장비 교체, 상수도무선통신망 구축 : 9. ~ 10월

- 업무관리 서버자원 증설 : 12월

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 전산정보과장 :홍동섭☎1560 담당 : 백영희☎1561

수도계량기 및 부속자재 구매

□ 사업개요

◦ 목    적 : 우수한 품질의 수도계량기와 부속자재를 구매하여 수도 사용량 측정의 정확도를 높여 세입 증대

◦ 규    모 : 수도계량기 구매 - 15mm~300mm 17종 205,387개,

부속자재 구매 - 80mm 스트레나 등 30종 43,187개,

동파예방 자재 구매 – 보온덮개 35만매 등

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2014. 12월

◦ 사 업 비 : 9,803,098천원 (예산현액 10,089백만원, 사고이월 786백원, 전용 500백만원)

□ 추진사항

◦ 집행현황                                                  (단위 : 백만원)

사 업 명	예산액 (A)	예산현액 (B)	원인행위액 (C)	지출액 (D)	집행률 (C/B)	비고
수도계량기 및 부속자재 구매	9,803	10,089	3,670	2,071	36.4

◦ 집행내역 : 수도계량기 구매 – 소형수도계량기(15mm)등 14건 119,253개

부속자재 구매 – 스텐레스2F단관 등 3건 구매

□ 상반기 집행 부진 사유

◦ 집행시기 미도래

-  구매단가가 높은 동파안전계량기 및 고품질계량기 하반기 구매

-  보온덮개 구매 등 동파예방사업 하반기 시행

□ 향후 대책

◦ 향후 추진계획

- 동파안전계량기 구매 : 37,000개(7월중)

- 고품질계량기 구매 : 750개(8월중)

- 보온덮개 구매 : 35만매(8월중)

- 보온재 설치 : 1식(11월중)

작 성 자	요금관리부장 : 이종욱☎3146-1601 계측관리과장 : 황오주☎1250 담당 : 이상구☎1254