		『서울지하철 9호선 연장건설(2단계) 정보통신설비공사』 현업사무실(역무관리실) 스위칭허브 설치 실정보고

▣  관련 문서

○ 서울메트로 사업수행센터-2788(‘14.12.12)

- 9호선 2단계 역무관리실(직원사무실) 스위칭허브 설치 요청(84회선, 스위치허브5대)

○ 서울메트로 사업수행센터-2691(‘14.12.08)

- 9호선 2단계 기능실 구내전화 및 LAN회선 설치 요청

▣  실정 검토

○ 서울메트로 운영 상주직원이 역무실(926~930)에 임시 상주키로하여, 역무실에 설치할 전화,컴퓨터,팩스 등의 용도로 사용하기에는 회선수가 부족하므로 스위칭허브를 설치하여 사용토록 조치(케이블 추가 포설 보다 저렴)

○ 공사비 산출내역(직접비)

품명	규 격	단위	수량	재료비		노무비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액
합 계				-	6,943,326	-	708,498	-	7,651,824	증감
구내 전화기	MFC	EA	-	-	-	-	-	-	-	당초
			15	30,284	454,260	4,476	67,140	34,760	521,400	변경
			15		454,260	4,476			521,400	증감
스위칭허브	24Port 10/100/ 1000 Base-T	EA	-	-	-	-	-	-	-	당초
			6	1,081,511	6,489,066	106,893	641,358	1,188,404	7,130,424	변경
			6	-	6,489,066	-	641,358	-	7,130,424	증감

○ 품셈 및 단가적용 기준

공정별	단 가 적 용 기 준
1. 구내전화기	- 기 계약단가(재료비, 노무비) 적용
2. 스위칭허브	- 신규단가 적용 ․ 재료비 : 조달단가(₩1,250,000)에 낙찰율(85.495%) 적용 ․ 노무비 : 정보통신표준품셈(통신7-1-1) 및 상반기 정부노임 단가에 낙찰율 적용 ※ 시공사 조달단가 조달 합의(2014.12.11)

▣  검토의견

메트로운영사 직원의 근무환경 구성을 위하여 랜스위치 설비 설치가 필요하며, 품셈 및 단가 적용이 적정하므로 우선 조치 후  준공시 정산설계변경 추진이 타당하다고 사료됨