문서번호	하천관리과-17047
결재일자	2017.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환안전국장
협 조
	물재생계획과장
	하수관리팀장

용산구 한강로 일대 방재시설확충

단위사업(펌프장 및 관로)간 사업계획 조정 보고

2017. 10.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

용산구 한강로 일대 방재시설확충

단위사업(펌프장 및 관로)간 사업계획 조정 보고

『용산구 한강로일대 방재시설 확충사업』추진 중 펌프장 신설 등에 따른  사업비 조정 검토 요청이 있어 단위사업간 사업비(예산)를 조정하여 사업추진에 철저를 기하고자 함

1		사업개요

○ 위    치 : 한강대교 북단 ~ 남영역간

○ 사업규모

- 빗물펌프장 신설 : 펌프용량 1,010㎥/분, 면적 2,364㎡

- 유역분할 관거 : ▣2.0☓2.0~D2,400mm, L=1.29㎞

- 기존관로 개량 : L=1.98㎞

○ 사업기간 : 2013. 12. 27. ~ 2018. 6. 30.

○ 총사업비 : 50,718백만원(국비 24,054, 시비 26,664)

- 예산현황(현재)

(단위 : 백만원)
구분	재원	계	기투자	2017년	2018년	비고
합계	소계	50,718	29,975	13,562	7,181
	국비	24,655	14,284	6,035	3,735
	시비	26,664	15,691	7,527	3,446
빗물 펌프장	소계	30,958	21,575	8,892	491	설계·감리비 4,847포함
	국비	14,775	11,084	3,200	491
	시비	16,183	10,491	5,692	-
유역분할관로	소계	19,760	8,400	4,670	6,690
	국비	9,279	3,200	2,835	3,244	`17추경 10억포함
	시비	10,481	5,200	1,835	3,446

2		추진경위

○ '10.09.21. : 집중호우 침수피해 발생

○ '13.12.27. : 빗물펌프장 설치공사 착공

○ '16.12.20. : 유역분할(관로 2구간) L=209m 신설완료

○ '17.05.31. : 유역분할(관로 1구간) L=389m 신설완료

○ '17.07.03. : 사업계획 변경방침(구청장 방침 제75호)

- 사업비 증액 : 50,718백만원 → 52,200백만원(증 1,482백만원)

- 사업기간 연장 : 2017. 7. → 2018. 6. (증 334일)

○ '17.07.04. : 사업계획 변경요청(용산구 → 서울시)

○ '17.09.14. : 사업비 증액불가 회신 (서울시 → 용산구)

- 공사위치 및 규모 등의 변경없이 단순 사업비 증액불가(사업기간 연장 승인)

○ '17.10월 현재 : 빗물 펌프장 구조물 공사중(공정율 76%)

관로 4구간 하수관로 신설중(공정율 75%)

3		단위사업별 추진현황

○ 빗물 펌프장/유역분리/기존 관로정비

구분	펌프장 신설	유역분리(관로신설)				기존 관로정비	비고
		1구간	2구간	3구간	4구간
사 업 규 모	펌프용량 Q=1,010㎥/분 면적 2,364㎡	D=1,800㎜∼▣3.0×1.8m L=393m	D=2,400㎜ L=209m	D=2,400㎜ L=146m	▣2.0×2.0m L=544m	[관로개량] D=1,000㎜ L=1.63km [암거보수] L=0.6km	전면 책임감리 1식
공정율	76%	완료	완료	10월 발주 (계약심사)	75% (409m완료)	`18년시행	시행중

4		사업추진 문제점

○ 총 사업비 부족 : 632백만원

- 펌프장 신설 구간의 가시설공법 변경 및 공사기간 연장에 따른 강재 손료 증가 등으로 공사비가 증가되어 4,063백만원 부족발생(증액)

- 유역분리 신설 관로 4구간 공사구간 중 도시환경정비사업자 시행분 (L=135m) 제외 등으로 3,431백만원 감액발생

[과부족액 현황]

(단위 : 백만원)
구 분	당 초	변 경	증·감
계	50,718	51,350	(증) 632
빗물 펌프장	30,958	35,021	(증) 4,063
유역분리 관로	19,760	16,329	(감) 3,431

5		사업계획 조정

○ 총사업비 부족액(632백만원)과 펌프장 및 관로 사업비 증□감에 대해 사업의 시급성 등 우선순위에 따라 사업계획을 조정

- 본 사업은 침수해소를 위한 수방대책 사업으로 펌프장 및 통수능 확보를 위한 관로공사는 금회 완료토록 하고,

- 기존 공사구간 중 암거보수(L=600m, 철근노출 및 재료분리) 공사는 금회 사업에서 제외하고, 추후 별도 예산을 확보하여 정비코자 함

구 분	당 초	변 경	비 고
사업규모	∘ 기존 관로개량 D=1,000㎜, L=1.63km ∘ 암거보수 L=0.6km	∘ 기존 관로개량 D=1,000㎜, L=1.63km ∘ 암거보수 (제외)
사 업 비 (백만원)	2,309	1,677

○ 사업비 증·감 내역

구분	합계	펌프장 신설				유역분할
		소계	펌프장	토출관로	감리 기타	소계	1구간	2구간	3구간	4구간	기존 관로
당초	50,718	30,958	22,375	3,736	4,847	19,760	5,691	4,029	2,208	5,523	2,309
변경	50,718	35,021	26,907	3,267	4,847	15,697	5,821	3,660	2,393	2,146	1,677
증·감	-	증)4,063	증)4,532	감)469	-	감)4,063	증)130	감)369	증)185	감)3,377	감)632
추진상황		-	진행중	완료	진행중	-	완료	완료	예정	진행중	예정

○ 총 사업비 조정 계획

- 유역분할 관로사업비 감액분 4,063백만원을 사업비 증액에 필요한 펌프장 신설공사에 사용

(국비 : `17년 추경 1,000백만원, `18년 예산 3,063백만원)

(단위 : 백만원)
구분	재원	계	기투자	2017년	2018년	비고
합계	소계	50,718	29,975	13,562	7,181
	국비	24,054	14,284	6,035	3,735
	시비	26,664	15,691	7,527	3,446
빗물 펌프장	소계	35,021	21,575	9,892	3,554	설계·감리비 4,847포함
	국비	18,838	11,084	4,200	3,554	`17추경 10억포함
	시비	16,183	10,491	5,692	-
유역분할관로	소계	15,697	8,400	3,670	3,627
	국비	5,216	3,200	1,835	181
	시비	10,481	5,200	1,835	3,446

※ 행정안전부 사업비 48,109백만원중 국고보조금 50% 지원(설계비 및 사업비증액 등 2,609백만원 제외됨)

6		향후계획

○ 2017. 12.  : 빗물펌프장 토목구조물 및 펌프시설 완료

○ 2018. 04.  : 빗물펌프장 및 유역분리 관로 완료

○ 2018. 06.  : 기존관로 정비 및 전체 사업완료

붙임  : 세부사업 현황표 1부.  끝