용  역  설  명  서

1. 용 역 명 : 2014년 북부수도사업소 관내 배수지 항청소 용역(단가계약)

2. 목    적

우리사업소에서 관리하고 있는 공릉배수지 외 7개소에 대하여  수돗물 유입 및 유출과정에서 생긴 퇴적물 및 부유물 등 배수지 벽면에 부착된 이물질 제거 등을 위한 정기적인 항청소를 시행함으로써 주민에게 안전하고 깨끗한 물을 안정적으로 공급코자 함.

3. 용역개요

배수지명	총 계	공릉	월계	상계2	번동소	수유5	수유6	4.19	우이
용 량 (㎥)	281,400	170,000	100,000	1,400	2,000	1,200	3,000	2,000	2,000
청소면적 (㎡)	297,472	169,476	110,646	1,840	3,701	2,174	3,897	2,869	2,869

4. 용역기한 : 착공일로부터 ~ 2014. 12. 31까지

5. 용역일정표

구 분		용량 (㎥)	공 정 (일)									비고
			3~4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자재준비 및 현장조사			■				■	■
번동가압장	번동소배수지	2,000		■					■
수유가압장	수유 5배수지	1,200		■					■
	수유 6배수지	3,000		■					■
우이가압장	4.19배수지	2,000		■					■
	우이배수지	2,000		■					■
상계가압장	상계2배수지	1,400		■					■
공릉배수지		170,000		■	■					■
월계배수지		100,000			■					■
정리정돈 및 기타					■					■

※  작업 일정 및 시간은 변경될 수 있음.