남부도로사업소 청사 건립 설계용역

(설계공모)

연번	절 차	일 정	비 고
0	설계공모공고안 및 과업지시서 작성	‘14.11.14	건축부, 설비부, 방재시설부
1	건축정책자문위원회	‘14.11.21	건축기획과
2	기술용역타당성심사	‘14.11.24	기술심사담당관
3	건설기술심의(용역발주심의)	‘14.11.24	〃 (처리기안2주)
4	설계공모 심사위원회 구성		- 설계공모심사위원회 후보요청 - 설계공모심사위원회 선정위원회개최
5	용역발주 계획	‘14.12.08
6	일상감사의뢰	‘14.12.08	감사관 (처리기안2주)
7	설계공모의뢰	‘14.12.22	시민소통기획관
8	설계공모	‘14.12.26	시민소통기획관
9	현장설명	‘15.01.06
10	응모신청서 등록	‘15.01.08~09
11	질의기간	‘15.01.12~13
12	질의회신	‘15.01.21
13	작품접수마감	‘15.03.05	70일
14	작품심사	‘15.03.16
15	설계용역계약	‘15.03.31
16	설계용역착수	‘15.04.01
17	설계용역준공	‘16.03.26	12개월