용역 준공기한 연기의뢰서

□ 용역 개요

가. 용 역 명 : 잠실·천호대교 남단IC 연결체계 개선 기본 및 실시설계

나. 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링외 3개 공동수급업체

다. 계약금액 : 금1,385,938,000원(금일십삼억팔천오백구십삼만팔천원)

라. 계약년월일 : 2016.06.03.

마. 착수년월일 : 2016.06.09.

바. 준공예정일 : 2018.03.31.

2. 의뢰 내용

○ 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 : 당초 2018.03.31. → 변경 2018.06.30.

나. 연기 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 기본설계보완 및 재검토 실시[도로계획과-15772(2017.11.7.)]에 따른 보완내용 주민설명회 및 설계VE, 기술심의 등 행정절차 이행을 위한 절대 소요기간 부족

2018. 3.

도로계획과장 하 종 현(인)

서울특별시 경리관 귀하