문서번호	물재생계획과-2353
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장		물관리정책관
협 조
	하수정비팀장

우기전 하수관로 정비사업 공정관리 추진계획

2014. 2

도시안전실

(물재생계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	25개 자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

우기전 하수관로 정비사업 공정관리 추진 계획

우기전(6월30일) 하수관로 정비사업이 효과적으로 완료 될 수 있도록 자치구 건설국장 및 하수과장 정례회의를 추진하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

2014 하수관로 정비사업 개요

사업명		규 모	예산액(백만원)
주민참여 예산사업		10건 L=3.4㎞	2,907
하수관로 신설개량		50건 L=24㎞	93,405
하수관로 종합정비		35건 L=80㎞	145,432
하수관로 보수보강	원형관로	12건 L=11.4㎞	12,550
	사각형거	37건 A=69,638㎡	29,042
빗물유입시설 확충		57개 지역 3,000개소 □ 침투형 : 빗물받이1,113개, 트랜치 725m □ 기능형 : 연속형3,030m, 측면통수형150개 □ 일반형 : 신설,확대,개량 1,401개	5,000

중점 공정관리 대상사업 : 총43건 16㎞(첨부물 참조)

❍ 하수관로 신설개량 : 총 19건 9.0㎞

❍ 하수관로 종합정비 : 총 24건 7.0㎞

❍ 빗물유입시설 확충 : 57개 지역 3,000개

※ 노후불량 하수관로 및 보수보강 사업도 공정관리 병행하여 시행

추진개요

❍ 추진기간 : ‘14. 3. 12 ~ 6. 18

❍ 회의장소 : 물관리정책관 회의실 또는 물재생계획 과장실

※ 총 10회 : 건설국장 회의(2회), 하수과장 회의(8회)

❍ 회의주재 : 물관리정책관(물재생계획과장)

❍ 회의내용 : 자치구별 공사추진실적 보고(문제점 및 현안사항)

❍ 4개 권역별 자치구 공정회의 일시 및 참석대상

구분	자치구명	회의일시 및 참석자	비고
도심권 및 서북권 (7)	종로,중구,용산,성동, 은평,서대문,마포	- 3.12(수) 14시 : 하수과장 - 4.16(수) 14시 : 하수과장 - 6.11(수) 14시 : 건설국장
서남권 (6)	양천,강서,구로, 금천,영등포,동작	- 3.19(수) 14시 : 하수과장 - 4.30(수) 14시 : 하수과장 - 6.18(수) 14시 : 건설국장
동북권 (7)	광진,동대문,중랑, 성북,강북,도봉,노원	- 3.26(수) 14시 : 하수과장 - 5.14(수) 14시 : 하수과장 - 6.11(수) 14시 : 건설국장
동남권 (5)	관악,서초, 강남,송파,강동	- 4. 2(수) 14시 : 하수과장 - 5.28(수) 14시 : 하수과장 - 6.18(수) 14시 : 건설국장

중점논의 사항

❍ 자치구별 추진사업에 대한 공정관리 목표 적정여부

❍ 예산 재배정 미요청, 미발주, 미계약, 미착공 등 부진사유 및 만회대책

❍ 빗물유입시설 확충사업은 6.30이전 완료 계획

- 빗물침투시설은 세부추진사항 보고

❍ 수방기간(2014.6.15~10.15)중 공사장 관리대책

- 공사장별로 비상연락망 구축현황 제출 및 수방 장비 준비

- 우기시 공사장별 현장대리인 및 감리 상주, 공사인부 관리

❍ 시민불편 최소화 방안 이행여부

- 소음‧진동 최소화, 보행권 확보, 대시민홍보 등

행정사항

❍ 상기 우기전 공사장 공정관리계획을 자치구에 시달하고,

회의자료는 필히 회의개최 2일전까지 물재생계획과로 제출 요망

❍ 공정회의시 문제점 차기 회의시 대책 보고

❍ 부진사업장 시·구 합동대책회의 및 현장조사 별도 시행

첨부 : 우기전 완료대상 사업 목록 1부. 끝.

첨부) 우기전 완료대상 목록

〇 하수관로 신설개량(침수방지사업) [19건]

연번	자치구	사 업 명	사 업 개 요	연장(m)
		계		9,039
1	용산	이태원동 527~671번지간 하수관 개량	D=900~1,350mm, L=245m	245
2	용산	청파동 91-24~139-1 번지간 하수관 개량	D=900~□1.8×1.8m, L=260m	260
3	용산	청파동 32-1~47-2번지간 하수관 개량	D=1,200mm, L=238m	238
4	성동	송정동 73번지 주변 침수방지	D=1,500mm, L=250m	250
5	성동	홍익동 151번지 주변 하수관 개량	D=1,500mm,L=130m	130
6	강북	송천동 473번지 주변 하수관로 확대개량	D=900mm,L=190m	190
7	서대문	아현역 횡단 사각형거 확장	□3.5×2.0m, L= 99m	99
8	양천	목3동 621-12~625-28 하수관 개량	D800~1500㎜, L=210m	210
9	구로	구로2동 472번지 일대 침수방지	ㅁ2.5*2.0m, L=48m	48
10	금천	독산2동 381번지 주변 하수도 개량	D1000㎜, L=380m	380
11	금천	독산동 범안로 주변 하수도 개량	D1200, L=210m	210
12	영등포	신길동 도신로 하수관 개량	D600~1,200㎜, L=450m	450
13	관악	서원동 1641-20~86-10호 외2개소 하수관 개량	D900mm,L=204m,D1000mm, L=200m	404
14	관악	은천동 903-19~903-9호외 1개소 하수관 개량	D900mm,L=50m, D1000mm, L=150m	200
15	관악	삼성동 808-494번지 주변외 2개소 하수관 개량	D900mm,L=300m,D1000mm, L=125m	425
16	서초	방배동 효령로 일대 하수관로 개량	D1000mm, L=450m	450
17	송파	문정동 105~111-9간 외 1개소 하수관개량	D900~1000mm, L=350m	350
18	송파	문정동 54번지 주변 외 1개소 하수관개량	D1200mm, L=500m	500
19	25자치구	자치구 지선관거 보조사업	25개 자치구 지원	4,000

〇 하수관로 종합정비(침수방지사업) [24건]

연번	배수분구	사업비(백만원)	정비연장(m)	통수능향상(m)
				소 계	우기전	우기후
	합 계		80,648	16,662	7,741	8,921
1	필동	5,000	3,040	885	400	485
2	성수2	5,000	2,877	750	524	226
3	구의	7,000	4,915	977	643	334
4	장안	2,454	2,242	1,019	197	822
5	면목1	7,000	8,037	641	137	504
6	동선	6,500	2,961	332	198	134
7	수유2	7,000	5,698	508	508
8	창동2	5,000	2,033	203	203
9	공릉1	5,000	3,149	687	687
10	하계	5,000	3,497	976	337	639
11	구산1	5,678	3,564	896	635	261
12	녹번2	5,000	2,742	503	388	115
13	남가좌1	5,000	4,157	484	154	330
14	신월1	3,699	2,136	433	133	300
15	등촌1	7,000	2,572	470	228	242
16	화곡1	2,902	1,397	286	145	141
17	오류1	5,000	1,961	503	358	145
18	공단	2,700	913	376	376
19	시흥저지	5,000	2,377	673	331	342
20	가리봉	3,000	2,120	1,151	236	915
21	신림4	5,000	1,293	579	55	524
22	대림	6,665	2,876	1,023	510	513
23	삼성1	2,000	803	261	161	100
24	대치	2,000	1,467	668	197	471