우이신설선 시설물 인수인계전 합동점검 시행계획

우이신설 도시철도 주무부서와 시설물 인계인수 전 안전하고 원활한 운영을 위해 각 분야별 시설물 정상가동 및 시민 불편사항이 없는지 합동점검을 실시하여 안전운행에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		합동점검 개요

□ 점검기간 : ’17.12.12(화) ~ 12.14(목) 3일간

□ 점검구간 : 11.4km, 정거장 13개소, 차량기지 1개소

□ 점검대상 : 우이신설 도시철도 시설물 현황(11개 분야)

○ 건축, 검수, 궤도, 기계, 송변전, 신호, 전기, 전차선, 차량, 토목, 통신

□ 점검방법 : 도시기반시설본부, 시행사, 서울교통공사와 분야별 합동점검

○ 기술자문요원은 서울교통공사 협조 요청(별도 공문 발송)

- 기술자문은 분야별로 상세 점검 후 개선 및 보완사항을 작성하여 제출(11.24)

Ⅱ		세부 합동점검 계획

□ 교통본부 우이신설 경전철 점검인원 : 21명

○ 市 교통정책과 : 3명(민자철도운영팀장, 팀원 2)

○ 서울교통공사 기술자문 : 9명(1일 3명) 이내  ※ 인원‧명단 등은 교통공사 추천

○ 시행사(운영사) : 9명(1일 3명) 이내

※ 도시기반시설본부 합동점검반 및 입회자(감리, 시공)는 도기본에서 별도 편성

□ 점검일정

구 분	일 정 (구 간)
	오 전	오 후
1일차 ’17.12.12.(화)	10:00 분야별 시설물 점검대상 현황 브리핑(운영사) * 우이신설선 차량기지 내 회의실 11:00 차량기지 현장점검	13:00 ~ 18:00 현장점검(3개역)
2일차 ’17.12.13.(수)	10:00 현장점검(2개역)	13:00 ~ 18:00 현장점검(3개역)
3일차 ’17.12.14.(목)	10:00 현장점검(2개역)	13:00 ~ 18:00 현장점검(3개역)

※ 현장점검 일정은 현장상황에 따라 탄력적으로 조정 가능

Ⅲ		행 정 사 항

□ 기술자문으로부터 합동점검시 지적된 개선․보완 사항은 교통본부에서 수합하여 도시기반시설본부에 통보, 조치사항 확인 후 인수인계

□ 서울교통공사는 1일 3명(총9명) 기술자문으로 추천하여 아래 양식에 의거 제출 ※ 11개 분야 시설물 총괄하여 점검 가능한 인력으로 추천

구 분	기 술 자 문				비 고
	소속	직급	성명	연락처
1일차 (10:00~18:00)	도시철도설비부	6	박철호	*************
	유탑엔지니어링	이사	명현중	*************
	현대로템	소장	안영철	*************
2일차 (10:00~18:00)	도시철도설비부	6	박명기	*************
	유 신	상무	이찬규	*************
	백 림	이사	김상진	*************
	현대로템	소장	안영철	*************
3일차 (10:00~18:00)	도시철도설비부	6	이상구	*************
	도화종합기술공사	이사	김용훈	*************
	현대로템	차장	이용윤	*************

□ 서울교통공사 기술자문은 교통본부 내 교통특별 대책추진(사무관리비) 예산 범위 내에서 별도 수당 지급

□ 도시기반시설본부는 분야별 합동점검자와 입회자(감리, 시공)를 지정하여 교통정책과로 통보 및 합동점검에 따른 현장 안내

□ 시행사는 시설물 현황 브리핑 및 관련자료 제공, 회의실 이용 협조

붙 임 : 1. 우이신설선 시설물 인수인계전 합동점검 결과(양식) 1부.

우이신설 시설물 인계인수전 합동점검 결과

점검일시 : '17. 11.    .(     )     :     ~    :

점검구간(장소) :

점검내용

점검대상	개선 보완 사항

점 검 자 :  소속              (서명) /   소속               (서명)

기술자문 :  소속              (서명) /   소속               (서명)

입 회 자 :  소속              (서명) /   소속               (서명)