7		우이～신설 지하경전철 건설

(도시기반시설본부, 도시철도공무부)

서울의 대표적인 취약지역에 신교통수단을 도입함으로써 동북부 지역의 교통체계 개선 및 지역균형 발전에 기여

1		사 업 개 요

❍ 사업내용

- 위    치 : 강북구 우이동 ~ 정릉 ~ 성신여대역 ~ 신설동역

- 규    모 : 연장 11.4㎞, 정거장 13개소, 차량기지 1개소

- 사업기간 : '09. 9. 15 ~ '14. 9. 14

- 사업방식 : 민간투자사업(BTO)

- 사업시행자 : (주)우이트랜스

❍ 사업기간 : 2009. 9. ~ 2014. 9.

❍ 총공사비 :  8,077억원

(건설보조금 3,661억원, 약정투자금 1,010억원, 타인자본 3,406억원)

- ’11년이전 : 131,404백만원 ,  ’12년 : 98,546백만원 ,  ’13년 이후 : 577,704백만원

❍ 기대효과

- 서울의 대표적 대중교통 취약지역에 신교통 수단을 도입하여 서울 동북부 지역 교통체계 개선 및 지역 균형발전 기여

2		추 진 결 과

❍ 추진경위

- 2003.06.30 : 민간투자사업 제안서 제출

- 2009.04.09 : 민간투자사업 실시협약 체결

- 2009.09.03 : 실시계획 승인 고시

- 2009.09.15 : 공사착공

❍ 추진현황('13년 4월말 현재 공정 36.5%)

- 차량기지 및 정거장 구조물, 출입구, 환기구 공사중

- 본선 터널 굴착 및 구조물 공사중

- 사업시행자 제출 공정계획 검토중

❍ 최근 3년간 예산집행 실적

(단위:백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용․변경(C)	예산현액 (D=A+B+C)	집행액 (E)	차년이월	불용액	집행률 (E/D)×100
2010	79,769	52,198	-	131,967	74,198	-	57,769	56.2%
2011	83,909	-	-	83,909	60,967	22,733	209	72.7%
2012	97,223	22,733	-	119,956	59,910	34,200	25,846	49.9%

※ 당해연도 추경은 당초예산에 포함 작성, ‘12년 신규사업은 ’12년도만 작성

※ 예비비 사용이 있을 경우에는 이․전용에 포함하고, 예비비 액수를 별도로 표시

❍ ‘12년 성과지표

(단위:백만원)

계 획	실 적	추 진 율	비 고
119,956	59,910	49.9%

3		추진상 애로점

❍ 일부 시공사의 워크아웃으로 일시 공사중단 및 타인자본 미투입 등 사업추진 부진

4		향 후 계 획

❍ 사업시행자가 제출한 공정계획 검토 결과를 토대로 사업정상화 방안에 대하여 사업시행자와 적극 협의 추진