문서번호	공원녹지과-13167
보존년한	5년
결재일자	2020.07.01.
공개여부	공개

★⊙주무관		공원관리팀장	공원녹지과장
			07/01
협조자
	도로조명담당주사
	공원기획담당주사

우장근린공원 어린이물놀이장 설치 및 운영사업 사업비 전용 검토보고

도 시 관 리 국

(공원녹지과)

우장근린공원 어린이물놀이장 설치 및 운영사업 관련

사업비 전용 검토보고

□ 어린이물놀이장 사업취소 결정

❍ 사 업 비 : 200,000천원(시비)

❍ 취 소 일 : 2020. 6. 12.(서울시 공원녹지정책과)

❍ 취소사유 : 물놀이로 인한 이용자 간 감염 전파 예방과 면역력이 약한 취약계층 보호 등 지역사회 확산 방지를 위해 물놀이장 추진 취소

□ 사업비 전용 검토

	< 예산의 전용>
2020년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 (2019. 7) ‣ 정책사업 내 단위사업간 예산을 변경하여 사용하는 것 ‣ 동일 정책사업 내의 단위사업간 편성목의 금액을 동일 편성목이나 다른 편성목에 전용 할 수 있음

❍ 서울시 공원녹지정책과 전용 가능사업 확인결과

물놀이장 예산과목	푸른도시국 공원녹지정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 시민참여 프로그램 운영, 공원이용 프로그램 운영, 행사운영비
전용가능사업 확인결과	푸른도시국 공원녹지정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원 내 공원등 시설개선, 시설비 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원 내 CCTV개선사업, 시설비

- 2020년 공원등 시설개선사업 사업비 : 810백만원 (봉제산 등 4개소)

※ 도로과 추진 (개소별 사업시행 중)

- 2020년 공원내 CCTV개선사업 사업비 : 200백만원 (봉제산 등 4개소)

※ 공원녹지과 추진 (‘20. 6. 사업완료)

□ 조치계획

❍ 공원내 CCTV개선사업은 기 시행 완료(봉제산공원 등 4개공원 8개소)함

❍ 도로과에서 시행중인 공원등 시설개선사업은 개소별 사업추진 중이며 봉제산근린공원(무궁화공원 일대)내 추가 정비수요가 발생되어 사업취소된 물놀이장 사업비를 전용하여 야간 보행환경 개선 및 안전사고를 예방하고자 함  (사업시행 : 도로과)

붙임  추가사업지 위치도 및 현황사진 1부.  끝.

□  위치도 및 현황사진

위 치 도