우장산 배수지 D=900mm 밸브설치 추진계획

공사일시 : 사전작업   2014.12.6.(토) 09:00 ~ 17:00

- 밸브운반, 호이스트 설치, 작업공간 확보(Con깨기 1m*1m*0.15m)

밸브설치 작업 : 2014.12.8.(월) 09:00 ~ 18:00

작업 소요시간

연번	작 업 명	소요시간	작업시간
계		10시간
1	강관 절단	1.5시간	12.8(월) 09:00~10:30 D=900mm 강관 절단
2	제수변 접합 및 설치	1시간	10:30~11:30
3	용접(4개소)	4시간	12:00~16:00
4	받침대 설치 및 마무리	2시간	16:00~18:00 주변청소 등

배관상세도

기존밸브 현황

밸브 교체

자재 준비

연번	자 재 명	규 격(mm)	단위	수 량	비 고
1	밸브(전동식 버터플라이)	900	개	1	12.2일 까지
2	강 이음관	900	개	2	"
3	강 플랜지관(제작)	900	개	2	"

인력 확보

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	비고
계	7명
소장	이성범	서울시 강서구 화곡7동 376-13	**************
용접공	김진남	경기도 광명시 가학동 산95-1	**************
용접공	이창현	서울시 용산구 후암동 1248-30	**************
용접공	우영구	인천시 남동구 간석동 32-5	**************
배관공	정창규	경기도안양시만안구안양2동823-24번지2층	**************
배관공	김성기	서울시영등포구대림2동1027-29	**************
보통인부	원종안	서울시 강서구 화곡동 362-116	**************
보통인부	변형근	서울시 은평구신사동35-5	**************

시공위치도

우장산 배수지 D=900mm 유출밸브 신설 위치

담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	감독대행 : 이준엔지니어링 양 갑 섭 담 당 자 : 강서수도사업소 서 장 원	************* 02-3146-4005
업 체	회 사 명 : 나일건설 대표 이춘화 현장소장 : 이 성 범	02-336-3351 *************

행정사항

공사전 관랑실(밸브실) 및 관랑실 상부에 호이스트 설치 : 업체

밸브 받침대 제작 및 현장 설치 (철재) : 업체

공사전 우장산#1지 항비움 (유출밸브 및 유입밸브 조절) : 기전팀

통수전 수질검사 : 고객지원과 수질팀