미아동 3-111번지 재건축 원가자문 일정

【 추진일정 】		【 단계별 절차 】		【 내 용 】
접 수 3. 21(월)		설계도서 접수 (조합,설계사 → 계약심사과)		▸신청서 접수 ▸설계도서 분야별 담당 분류
1일차 3. 22(화)		분야별 설계도서 검토 (원가심사반)		▸ 설계도면, 물량내역서 등 검토 ▸ 심사자료 보완사항 확인
2일차 3. 23(수)		사전검토 합동회의 (설계사, 적산업체, 원가심사반)		▸원가자문 기준 안내 ▸현장확인 일정 협의(필요시) ▸원가조정 거버넌스 일정 안내 ※ 제출서류 미비시 심사총괄담당이 수합 자료보완 요청(공문발송)
(보완 접수)		심사자료 보완 접수 (조합,설계사 → 계약심사과)		※ 심사자료 보완완료일로부터 심사 처리기간 다시 기산
3일~11일차 3.24(목)~. 4.05(화)		현장확인 및 원가심사 (원가심사반)		▸ 필요시 현장(조합) 방문 ▸분야별 원가심사 ▸원가조정 거버넌스 안건 선정
11일차 4. 05(화)		원가조정거버넌스 계획 수립 (운영지원반)		▸자문위원 및 참석 조합원 선정 ▸안건 등 발표자료(PT) 수합·정리 ▸회의자료 및 회의절차 마련 ▸위원별 자료 발송

13일차 4. 07(목)		원가조정거버넌스 개최 (조합,설계사,외부전문가 등)		▸원가조정 안건 검토 ▸심사내용 보완 및 결정 ▸자문결과 설계사 협의
14일차 4. 08(금)		심사결과 결정 (원가심사반)		▸원가자문 결과보고서 작성 ▸원가자문 문제점 및 개선방안 도출
15일차 4. 11(월)		심사결과 통보 (계약심사과 → 조합,설계사)		▸자문결과 통보

※ 상기 일정은 추진계획(안)이며, 보완서류 작성 등에 따라 자문일정이 변경될 수 있음