『구의 정수센터 재건설 및 고도정수시설공사 시험운전 관련』

원 수 사 용 계 획(안)

구의 정수센터 재건설 및 고도정수시설공사 시험운전과 관련하여 8월 13일부터  원수를 공급받아 시험운전을 추진할 계획으로 원수소요량 및 일정에 대한 계획임.

□ 일정별 원수소요량

구분	예정일정	유입 시간	시간당 유입량	일일 유입량	운전내용
1단계	8월 13일 ~ 8월 16일	4시간	1,000㎥/hr	4,000㎥/일	- 응집침전지 2지, 여과지3지, 활성탄흡착지 2지 간헐운전 자동운전 Test
2단계	8월 18일 ~ 8월 30일	8시간	1,000㎥/hr	8,0000㎥/일	- 응집침전지 2지, 여과지3지, 활성탄흡착지 2지 교번운전 자동운전 Setting 및 안정화

※ ’14. 9월부터 시험운전진행에 따라 하루 약3만톤부터 최대 25만톤까지 소요

□ 활성탄흡착지 중화 및 세척 일정

공정		예정일정	비고
활성탄 흡착지 중화 및 세척	#13~16	7월 28일 ~ 8월 08일
	#9~12	8월 05일 ~ 8월 16일
	#1~8	8월 18일 ~ 8월 31일
활성탄 흡착지 안정화	#9~16	8월 13일 ~ 9월 15일	원수유입 : 8/13
	#1~8	9월 16일 ~ 10월 10일