성산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계

월간공정보고(5월)

2014. 6. 3

1. 과업추진내용 및 공정현황

2. 현안사항 및 다음달 과업수행계획

	(주)	평화엔지니어링
	(주)	진우엔지니어링
	(주)	동해종합기술공사
	(주)	세광엔지니어링

1. 과업추진 내용 및 공정현황

□ 기 간 : 2014. 5. 01 ~ 2014. 5. 31 (5月)

1.1 과업추진 내용

구 분		추 진 내 용	비 고
주요일정		∙ 자문회의 자료 작성 ∙ ECB 관련 자문회의 수행
분야별	도로 및 교통	∙ 도로점용공사장 교통소통분석 수립 준비 - 서울시 한강교량 및 고가철거 사례검토 ∙ 교통 시뮬레이션 프로그램 준비 - VISSIM 가로망 구축 (5/30)
	구조	∙ ECB 부재 자문회의 검토의견에 대한 조치내용 작성 ∙ 비파괴시험 추가 조사 자료 준비 ∙ 본교 하부 내진성능 평가 검토 ∙ 본교 우물통 현장 조사 ∙ 북단접속교 및 램프 B, F교 하부구조 검토 ∙ 남단 접속교 및 램프교 재하시험 실시 ∙ 외부강선 보강된 교량의 긴장력 산정 검토 ∙ 바닥판 시공방안 검토
	토질	∙ 허용지지력 평가 ∙ 설계지반정수 평가
	측량 및 지반조사	∙ 과업구간 좌표측량 및 현황측량 ∙ 남단 고수부지 및 본교,램프구간 현황측량 ∙ 도로 종단면도 작성 ∙ 추가측량부지 협의

1.2 공정현황

구 분	계 획(%)	실 적(%)	대 비(%)
월간공정	3.5	3.5	100
누계공정	39.5	39.5	100

A3 예정공정표(공정현황)

2. 현안사항 및 다음달 과업수행계획

구 분	현안사항 (5월)	다음달 과업 수행 계획 (6월)
공통	∙ 자문회의(ECB관련) ∙ 자문회의 결과에 따른 검토방안 수립 (ECB관련) ∙ 추가 측량 조사 ∙ 성산대교 추가 조사(비파괴검사, 부식두께 측정, 수직재 및 사재 내시경 조사 등)	∙ 자문회의 ∙ 자문회의 검토내용에 대한 조치내용 수립 ∙ 비파괴시험 업체선정 및 업무 지원 ∙ 실물모형 피로시험 업체선정 및 업무 지원 ∙ 변동응력 실험 업체선정 및 업무 지원
도로 및 교통	∙ 보완측량 자료를 활용한 종･평면 선형 복원	∙ 측량자료를 활용한 설계도면 작성 ∙ 공사계획 수립 후 공사중 교통처리계획 수립 예정 ∙ 교통 시뮬레이션 구축 - 네트워크 보완
구조	∙ 주경간교 - 자문회의 자료 작성(ECB관련) - ISSUE LIST 작성 - ECB부재 구조안전성 검토 - 한계상태설계법 적용성 검토	∙ 주경간교 - 자문회의 자료 작성 - ECB 자문회의 검토의견에 대한 상세 구조검토 수행 - 비파괴시험 추가 조사 자료 준비
	∙ 북단 접속교 및 램프교 - 하부 및 기초 구조해석 및 내진성능 평가 - 우몰통 현장조사 - 프리캐스트 바닥판 적용성 검토 - Bridge Inspector's Reference Manual 6.4 Fatigue and Fracture In Steel 해석	∙ 북단 접속교 및 램프교 - 하부 및 기초 구조해석 및 내진성능 평가 - 내진성능 평가 - 프리캐스트 바닥판 적용성 검토 - Bridge Inspector's Reference Manual 6.4 Fatigue and Fracture In Steel 해석
	∙ 남단 접속교 및 램프교 - 재하시험 실시(5.28) - 바닥판 교체등을 고려한 상부해석(shell) - 하부해석(Steel Box구간)	∙ 남단 접속교 및 램프교 - 내하력 평가 - 하부해석(PSC Beam구간) - 바닥판 교체방안 검토(전단연결재 시공방안등 검토)
토질	∙ 성능개선에 따른 하중조건 변경여부 확인하여 필요시 조사계획 수립	∙ 기초 지지력 평가 ∙ 가교 계획에 따른 지반조사 계획
측량 및 지반조사	∙ 좌표측량 및 현황측량(추가 구역 반영) ∙ 본교 중심선 측량 ∙ 내업 및 성과물 작성	∙ 좌표측량 및 현황측량(추가 구역 반영) ∙ 내업 및 성과물 작성