회 의 록
제 목	정보통신 월간공정회의(6월, 9차)	장 소	시스템감리단 회의실
일 시	2017. 06. 13 (화), 14:00∼15:00	작성자	유 성 영
1. 회의내용
<배종수 주무관> - 이동통신사가 설계서 제출(15일)하면 건축분야에 송부하여 6월20일 회의에서 관련사항 협의토록 할 것 - 신호분야 공정을 정확히 파악하여 신호공정에 맞추어 통신분야 공사 추진토록 할 것 - 935정거장 천정 도색작업이 7월중 추진 예정이므로, 통신분야 배관배선, CCTV등 관련 작업을 차질없이 추진할 것 - 근래 안전사고가 자주 발생하므로 특히 안전사고 예방에 철저를 기할 것 - 현장실정보고 조속히 할 것 <정보통신과장> - 작업추진 일정계획을 정확히 작성, 보고할 것 <정성채 소장> - 광케이블 공장검수 7월에 실시할 예정임 <현대정보기술> - 주전송 및 열차무선 장비를 불안정한 공사용 전원을 이용하여 현장에서 개별시험하는 경우 장비에 대한 데미지 우려 및 사용시간 한정 문제가 있으므로 공장에서 안정적인 전원을 이용하여 장비설정 및 개별시험 추진이 가능하며, 이 경우 다음과 같은 일정으로 추진함 : 공장검수 8월말, 반입 9월초, 설치 및 연동시험 10~11월, 개통 12월

사 진 대 지
내 용	정보통신 월간공정회의(9차)
장 소	시스템감리단 상황실	일 자	2017.06.13.(화)
내 용	정보통신 월간공정회의(9차)
장 소	시스템감리단 상황실	일 자	2017.06.13.(화)