도로굴착복구시스템 유지운영사업

프로젝트 진척 보고서(월간)

결재	PM	담당	팀장

○ 추진기간 : 2016. 06. 01 ~ 2016. 06. 30

○ 작 성 일 : 2016. 06. 30(목)

○ 작 성 자 : 이 승 경

○ 단위시스템 - 전체 진척율 (53.84%)

번호	세 부 내 용	단계	실진척율/전체진척율	관련문서번호
1	사업관리 및 단계별 산출물 작성	개발	2.55% / 5.0%
2	응용프로그램 보완개발	보완개발	19.29% / 30.0%
3	유지보수		32.0% / 65.0%

단위업무별 프로젝트 진척보고서

시스템명	도로굴착복구시스템	작성자	이승경	작성일	2016.06.30	문서번호

6월 월간 계획

6월 월간 실적

7월 월간 계획

응용

프로그램 보완개발

공정율

공정율

1. 산출물 작성

1) 사용자화면정의서

2) ERD

3) 테이블목록

4) 테이블명세서

5) 소프트웨어 변경기록부

6) 프로그램 목록 및 소스

7) DB 구축 내역 및 목록

2. 응용프로그램 개발

1) 과업 기능요구사항

FUR-002 허가자/신청자 로그인 및 메인화면 UI 개선

- 디자인 적용 작업

- 테스트 및 보완

2) FUR-003 지도API 변경

- 네이버, 다음 API 테스트

- 지도API 변경 작업

(7월중 적용 예정)

3) FUR-006 원인자부담금 완납 확인 연계 기능 개발

- 연계 처리 방안 검토

4) 기술협약

편의성, 효율성 향상을 위한 사용자 설문조사

- 시스템 개선사항 검토 및 처리일정 수립

- 연내 처리 가능한 요구사항 작업지시서 작성

1. 산출물 작성

1) 사용자화면정의서

2) ERD

3) 테이블목록

4) 테이블명세서

5) 소프트웨어 변경기록부

6) 프로그램 목록 및 소스

7) DB 구축 내역 및 목록

2. 응용프로그램 개발

1) 과업 기능요구사항

FUR-002 허가자/신청자 로그인 및 메인화면 UI 개선

- 디자인 적용 작업

- 테스트 및 보완

(7월2주차까지 진행예정)

2) FUR-003 지도API 변경

- 네이버, 다음 API 테스트

- 지도API 변경 작업

(7월중 적용 예정)

3) FUR-006 원인자부담금 완납 확인 연계 기능 개발

- 연계 처리 방안 검토

4) 기술협약

편의성, 효율성 향상을 위한 사용자 설문조사

- 시스템 개선사항 검토 및 처리일정 수립

- 시스템 기능개선 요구사항

처리

(작업지시-027) 협의요청시 유관기관의 관할구 명시

(작업지시-028) 납부관리>세금계산서 및 전표에 공사명, 주소 표기

5) 기타 처리사항

전자문서 연계 방식 변경

- 은평구청

변경전)주민등록번호

변경후)새올아이디

2.55%

19.29%

1. 산출물 작성

1) 사용자화면정의서

2) ERD

3) 테이블목록

4) 테이블명세서

5) 소프트웨어 변경기록부

6) 프로그램 목록 및 소스

7) DB 구축 내역 및 목록

2. 응용프로그램 개발

1) 과업 기능요구사항

FUR-002 허가자/신청자 로그인 및 메인화면 UI 개선

- 테스트 및 보완

- 실서버 적용

2) FUR-003 지도API 변경

- 네이버, 다음 API 테스트

- 지도API 변경 작업

(7월중 적용 예정)

3) FUR-006 원인자부담금 완납 확인 연계 기능 개발

- 연계 처리 방안 검토

4) 기술협약

편의성, 효율성 향상을 위한 사용자 설문조사

- 시스템 기능개선 요구사항

처리

(작업지시-029) IE 11 호환 점검 및 개선

(작업지시-030) 세션 유지 시간 연장

(작업지시-031) 로그인 페이지에 매뉴얼 다운로드 기능 추가

3.19%

21.53%

유지보수

4. 도로굴착복구시스템 유지운영 내역

처리내역	월간건수	누계건수
시스템수정	0	5
데이터변경	45	277
사용자 교육	265	1396
기타	41	283
합계	351	1961

32.00%

3. 도로굴착복구 시스템 유지운영

37.12%

주요이슈 및 부진사유에 대한 대책
내역			대응방안
산출물	일련번호	산출물 내역		첨부여부

인력별 프로젝트 진척보고서

성 명	등급	투입공수		실 적		계 획
		금월	누적
정종현	특급	0	4	1. 프로젝트 관리		1. 프로젝트 관리
이승경	고급	4	26	1. 프로젝트 관리 1) 사용자화면정의서 2) 소프트웨어 변경기록부 3) 프로그램 목록 및 소스 4) DB 구축 내역 및 목록 2. 응용프로그램보완개발 1) 과업 기능요구사항 FUR-002 허가자/신청자 로그인 및 메인화면 UI 개선 - 디자인 적용 작업 - 테스트 및 보완 2) FUR-006 원인자부담금 완납 확인 연계 기능 개발 - 연계 처리 방안 검토 3) 기술협약 편의성, 효율성 향상을 위한 사용자 설문조사 - 시스템 개선사항 검토 및 처리일정 수립		1. 프로젝트 관리 1) 사용자화면정의서 2) 소프트웨어 변경기록부 3) 프로그램 목록 및 소스 4) DB 구축 내역 및 목록 2. 응용프로그램 개발 1) 과업 기능요구사항 FUR-002 허가자/신청자 로그인 및 메인화면 UI 개선 - 테스트 및 보완 - 실서버 적용 2) FUR-006 원인자부담금 완납 확인 연계 기능 개발 - 연계 처리 방안 검토 3) 기술협약 편의성, 효율성 향상을 위한 사용자 설문조사 - 시스템 기능개선 요구사항 처리 (작업지시-029) IE 11 호환 점검 및 개선 (작업지시-030) 세션 유지 시간 연장 (작업지시-031) 로그인 페이지에 매뉴얼 다운로드 기능 추가
이선화	고급	3	24	1. 응용프로그램보완개발 1) 과업 기능요구사항 FUR-003 지도API 변경 - 네이버, 다음 API 테스트		1. 응용프로그램보완개발 1) 과업 요구사항 FUR-003 지도API 변경 - 네이버, 다음 API 테스트 - 지도API 변경 작업
조혜리	중급	0	18	1. 프로젝트 관리 1) ERD 2) 테이블목록 3) 테이블명세서 2. 응용프로그램보완개발 1) 기타 처리사항 전자문서 연계방식, 주민등록번호에서 사용자 새올 아이디로 변경 (은평구)		1. 프로젝트 관리 1) ERD 2) 테이블목록 3) 테이블명세서
최혜인	초급	4	26	1. 시스템운용지원 1) 사용안내, 데이터변경 2. 응용프로그램 개발 1) 기술협약 편의성, 효율성 향상을 위한 사용자 설문조사 - 시스템 기능개선 요구사항 처리 (작업지시-027) 협의요청시 유관기관의 관할구 명시 (작업지시-028) 납부관리>세금계산서 및 전표에 공사명, 주소 표기		1. 시스템운용지원 1) 사용안내, 데이터변경 2. 응용프로그램 개발 1) 기술협약 편의성, 효율성 향상을 위한 사용자 설문조사 - 시스템 기능개선 요구사항 처리 (작업지시-032) 굴착허가 업무의 신속한 처리를 위한 개선 요망 (SMS 전송 기능 개선. 재작성요청, 착공계반려 등) (작업지시-033) 지도에서 새주소, 구주소 병행 명기
총 인력투입현황		등급			총 투입공수
		특급			0
		고급			2
		중급			1
		초급			1