도로굴착복구시스템 유지운영사업

프로젝트 진척 보고서(월간)

결재	PM	담당	팀장

○ 추진기간 : 2017. 01. 02 ~ 2016. 02. 03

○ 작 성 일 : 2017. 02. 03(금)

○ 작 성 자 : 임 명 순

○ 단위시스템 - 전체 진척율 (6.83%)

번호	세 부 내 용	단계	실진척율/전체진척율	관련문서번호
1	사업관리 및 단계별 산출물 작성	착수 및 계획	0.58% / 5.0%
2	응용프로그램 보완개발	보완개발	0.00% / 30.0%
3	유지보수		6.25% / 65.0%

단위업무별 프로젝트 진척보고서

시스템명	도로굴착복구시스템	작성자	임명순	작성일	2017.02.03	문서번호

1월 월간 계획

1월 월간 실적

2월 월간 계획

응용

프로그램 보완개발

공정율

공정율

1. 프로젝트 관리

1) 사업준비 및 착수계제출

2) 사업수행계획서 제출

3) 작업계획 공정표 작성

4) 요구사항정의서

2. 응용프로그램 개발

1. 프로젝트 관리

1) 사업준비 및 착수계제출

2) 사업수행계획서 제출

3) 작업계획 공정표 작성

4) 요구사항정의서

2. 응용프로그램 개발

0.58%

0.00%

1. 산출물 작성

1) 프로그램 목록 및 소스

2) DB 구축 내역 및 목록

2. 응용프로그램 개발

1) 과업 기능요구사항

FUR-003  SMS 전송기능 개선

- 굴착허가 업무의  신속한 처리를 위한 SMS 전송기능 개선

FUR-007 하자관리 일괄 처리 기능 추가

- 하자검사 및 현장점검 일괄 처리 기능 추가

0.82%

3.64%

유지보수

4. 도로굴착복구시스템 유지운영 내역

처리내역	월간건수	누계건수
시스템수정	1	1
데이터변경	57	57
사용자 교육	193	193
기타	29	29
합계	280	280

6.25%

3. 도로굴착복구 시스템 유지운영

11.52%

주요이슈 및 부진사유에 대한 대책
내역			대응방안
산출물	일련번호	산출물 내역		첨부여부

인력별 프로젝트 진척보고서

성 명	등급	투입공수		실 적		계 획
		금월	누적
최재훈	특급	4	4	1. 프로젝트 관리 1) 사업준비 및 착수계제출 2) 사업수행계획서 제출 3) 작업계획 공정표 작성 4) 요구사항정의서		1. 프로젝트 관리 1) 요구사항정의서
임명순	특급	4	4	1. 프로젝트 관리 1) 사업수행계획서 작성 2) 작업계획 공정표 작성 3) 요구사항정의서 2. 응용프로그램 보완개발		1. 프로젝트 관리 1) 요구사항정의서 2) 소프트웨어 변경기록부 3) 프로그램 목록 및 소스 4) DB 구축 내역 및 목록 2. 응용프로그램 보완개발 1)FUR-003 SMS 전송기능 개선 - 굴착허가 업무의 신속한 처리를 위한 SMS 전송기능 개선 2)FUR-007 하자관리 일괄 처리 기능 추가 - 하자검사 및 현장점검 일괄 처리 기능 추가
김동은	특급	0	0	1. 응용프로그램 보완개발		1. 응용프로그램 보완개발
지현미	초급	0	0	1. 응용프로그램 보완개발		1. 응용프로그램 보완개발
천다인	초급	4	4	1. 시스템운용지원 1) 사용안내, 데이터변경		1. 시스템운용지원 1) 사용안내, 데이터변경
총 인력투입현황		등급			총 투입공수
		특급			2
		고급			0
		중급			0
		초급			1