2013년 항공사진 통합관리 서비스

월간업무보고서

- 12월 월간업무 현황보고 -
(2013. 12. 01 ~ 2013. 12. 31)

문 서 명	월간업무보고서
문서번호	PJ3-5-1-10	PM	감독관
작 성 자	박 철 희
보 고 일	2014년 1월 2일

사업 기간		2013.06.23 ~ 2014.01.23			실적기간		2013.12.01 ~ 2013.12.31
프로젝트명		2013년 항공사진 통합관리 서비스			사업자명		씨엠월드컨소시엄 PM 박 철 희
공정 진척 구분(%)		금 월			누 계				차 월
		계획	실적	대비율	계획	실적		대비율	계획
종 합	100.0	22.21	18.42	115.21	90.07	69.00		76.61	29.00
사업 관리	10	1.05	0.80	93.57	8.52	8.20		96.24	1.80
항공사진통합 서비스	50	10.24	6.70	95.08	41.55	33.70		81.11	14.30
영상지도제작 및 DB 변환 처리	40	10.92	10.92	100.00	40.00	27.10		67.75	12.90

	2013년 항공사진 통합관리 서비스 월간보고 (12월)		주관기관 담당자		최지혜 주무관
			사업수행 PM		박철희
	문서번호:PJ3-8-1-12월간업무현황보고서_1231	버전: 1.0		작성일자: 2013/12/31

금 월 실 적 (12/01 ~ 12/31)
사업관리	1. 준공계 및 준공검사 자료 작성 준비 o 준공계 작성 준비 o 검수확인서 작성 준비 o 테스트 계획서 작성 및 준비
	2. 2013년 항공영상 보안심의 수행 2-1. 항공영상 집성자료 보안심의 제출 o 일시 : 2013. 12월 16(월) 10:30 ~ 11:00 o 장소 : 국가정보원 o 내용 : 2013년 촬영 항공영상 집성완료 데이터 보안심의 제출 2-2. 항공영상 집성자료 보안심의 자료 입수 o 일시 : 2013. 12월 31(월) 10:30 ~ 11:00 o 장소 : 국가정보원 o 내용 : 2013년 촬영 항공영상 집성완료 데이터 보안심의 자료 입수
	3. 원본사진 자료 이상 유무 판단을 위한 Debugging o 일시 : 2013년 12월 5일 o 장소 : 서울시데이터센터 o 내용 : 원본자료 유무 판단을 위한 Utility 프로그램 실행 오류 파악을 위한 개발 Tool 설치 및 Debugging
시스템 개발	1. OFF-LINE 민원 대장 관리 o 시민(직접방문) 대장관리의 민원접수 번호 가져오기 2. 다운로드 o 원본파일 다운로드 - 업무 담당자 로그인 - 다운로드 이력 로그 o 원본파일 출력 3. 온라인 신청 관리 o 온라인 민원 결과 처리 4. 단계적 시스템 연계 테스트(로그인, 원본다운로드, 민원결과처리)
항공사진DB구축 및 영상지도제작	1. 항공사진영상제작 o 항공영상 국정원 보안심의 및 보안처리 o 2013년도 촬영외 지역(경기도) 영상 Merge 작업 2. 서울시 데이터 센터 자료 이관 (2013년 12월 27일 완료) - 전체 : 83회차(148,996) - 누계 : 83회차 (149,190 - 100% 완료) - 누락자료 입수 (TIF : 307/286, JP2 : 331/338) 2-1. 원본자료 망실 및 손상 데이터 파악 - 전체 : 30회차 96매 확인 3. 원본(TIF), 서비스(JP2) 파일명 비교 (2013년 12월 12일 완료) - 전체 : 83회차(148,996) - 누계 : 83회차 (148,996) - 100% 완료) - 변경대상 : 11회차 16,204매 4. 2013년 촬영 항공사진 DB변환 및 정비 (2013년 12월 17일 완료) o 촬영정보 성과상세내역, 촬영정보 DB구축 o 파일명 표준화 작업 o 주점생성 o 파일 포맷 변환 (Tiff -> ECW, JP2) 5. 과거사진 보안 조치 (2014년 1월 10일 완료 예정) o 2009년 25cm급 보안 기준 보안 조치 수행 - 전체 : 83회차(148,996) - 누계 : 83회차 (112,311) - 75.4% 완료)

익 월 계 획 (01/02 ~ 01/23)
사업 관리	1. 정기보고 o 완료보고 자료 준비 o 완료보고 발표
	2. 교육 및 훈련 o 사용자/운용자 교육계획 수립 o 사용자 교육 o 운영자 교육
	3. 2013년 촬영 항공사진 컬러인쇄 제작 o 서울시 전역의 항공영상 10부 제작 관련 협의
	4. 준공 검사 o 준공계 및 준공검사 자료작성 o 준공 검사 및 확인
시스템 개발	1. 기능 및 통합 테스트 o 테스트 계획 수립 - 총괄시험계획서, 시스템시험 시나리오, 통합시험 시나리오 작성 o 통합테스트 및 시스템 테스트 - 통합테스트 결과서 작성 - 시스템 테스트 결과서 작성 2. 시험서비스 및 안정화 o 운영시스템 설치 o 시험서비스 o 보완 및 안정화
항공사진DB구축 및 영상지도제작	1. 항공사진영상제작 o 항공영상 국정원 보안심의 결과 보안처리 o 항공영상 도엽인덱스(1:1,000, 1:5,000) 및 구별 영상 제작 2. 원본파일 DB화 구축 o 망실 및 일부 손상 영상 재이관 - 파일 포맷 변환 (Tiff -> ECW, JP2) - 누락 원본자료 주점정보 생성 - 누락 파일 재이관 및 파일명 변경 수행 3. 2013년 촬영 낱장사진 보안지역 추출 o 국정원 보안 심사 완료 자료를 기준으로 보안 지역 촬영원본 추출 - 서울시 서소문별관 건축기획과 사진실 4. 과거사진 보안 조치 o 2009년 25cm급 보안 기준 보안 조치 수행 5. 운영 시스템 자료이관 o 2013년 촬영정보 성과상세내역, 촬영정보 o 누락 주점 o 원본파일명 변경 내용 적용 o 과거사진 보안조치를 위한 DB 적용 o 서비스 파일(JP2, ECW) 25cm급 영상 자료이관 - 83회차 총 148,991매 6. 2013년 항공영상 Tile Map 재작 및 서비스 반영 o 25cm급 항공영상 Tile Map 재작 및 국정원 보안 처리 심의 o 보안처리 심의 완료 후 서비스(2013년 항공영상 API 추가)

기타사항
협의사항
기타사항

[ 목표 미완료/초과 완수 업무현황 및 처리계획 ]

업무현황	진행 현황 및 처리계획
DB변환 및 정비	1. 시도행정 연계 분석 파악을 위한 민원처리 및 로그인 처리
항공사진 제작	1. 보안검사 후 보안처리 및 도곽(1:1,000, 1:5,000) 및 구별 영상 제작 수행 처리

[ 주요의사결정 및 협조사항 ]

주요의사결정 및 협조사항	1. 25cm급 서비스 파일(JP2) 이전을 위한 서울시 항공영상 시민/웹 서비스 공간확보 2. 2013년 항공영상 통합관리 서비스 프로그램 다운로드를 위한 웹 페이지 Link

[ 이슈 및 위험요소 관리현황 ]

이슈 및 위험요소 관리현황	현황	처리/진행 결과	해결일자