	월간 업무 현황 보고서
	단계	실행 및 통제	프로세스명	보고관리	문서번호
	버전	v 1.0	사업명	RFID기반 유물출납관리시스템 구축확대	작성부서

▪ 사 업 명	: RFID기반 유물출납관리시스템 구축확대 사업
▪ 사 업 부 서	: 시설과(유물관리과)
▪ 추 진 기 간	: 2014.11.20. ~ 2015.02.27.
▪ 진 행 단 계	: 2015.02.01. ~ 2015.02.27. (3월차/3월)

번호	작업구분명	사업기간	단계	진척율		비고
				실적	계획
1	사업관리	2014.11.20. ~ 2015.02.27	착수	100%
2	현장조사	2014.11.20. ~ 2014.12.05	분석	100%
3	요구사항분석	2014.11.20. ~ 2014.12.31	분석	100%
4	공사설계/주문제작	2014.12.01. ~ 2015.01.02	설계	100%
5	기능설계	2014.12.01. ~ 2015.01.02	설계	100%
6	인프라 구축	2015.01.05. ~ 2015.01.30	구축	100%
7	S/W개발	2014.12.15. ~ 2015.02.06	구축	100%
8	시험	2015.02.02. ~ 2015.02.20	시험	100%
9	운영 및 안정화	2015.02.16. ~ 2015.02.27	안정화	100%
10	검수	2015.02.23. ~ 2015.02.27	종료	100%

월간 업무 현황 보고서

주간(월간)업무현황보고서

서울특별시                                                               PP515-/1                                                              포스트미디어 컨소시엄

진행단계	착수 / 분석						전체 진척율	100%
단위과제	지난 월 실적(2015.02.01. ~ 2015.02.27.)						금월계획(2015.03.01. ~ 2015.03.31.)
	계 획		진척율	실 적		진척율	내 용		진척율
사업관리	주간보고, 사업관리, 품질관리 중간보고 및 리뷰 검수 및 사업완료		100%	주간보고, 사업관리, 품질관리 중간보고 및 리뷰 검수 및 사업완료		100%
인프라 구축	인프라 구축 RFID태그 납품 시험 판넬PC, RFID리더 통신 시험 슬라이딩도어 제어 시험		100%	인프라 구축 RFID태그 납품 시험 판넬PC, RFID리더 통신 시험 슬라이딩도어 제어 시험		100%	안정화 지원
S/W개발	프로그램 개발 및 테스트 판넬PC 연동용 미들웨어 API 완료 슬라이딩 도어 제어 관련 미들웨어 모듈 완료 판넬PC 프로그램 완료 SMS 알림 전송 기능 완료 관제솔루션 관제솔루션 설치 및 구성 완료		100%	프로그램 개발 및 테스트 판넬PC 연동용 미들웨어 API 완료 슬라이딩 도어 제어 관련 미들웨어 모듈 완료 판넬PC 프로그램 완료 SMS 알림 전송 기능 완료 관제솔루션 관제솔루션 설치 및 구성 완료		100%	안정화 지원
기타	유물 이미지 관리용 스토리지 납품 - 32TB 2대 Mac 데스크탑용 소모품 납품 - Mac 용 한컴오피스, 마우스, 키보드, 모니터후드 서버, 스토리지 연결용 부품납품		100%	유물 이미지 관리용 스토리지 납품 - 32TB 2대 Mac 데스크탑용 소모품 납품 - Mac 용 한컴오피스, 마우스, 키보드, 모니터후드 서버, 스토리지 연결용 부품납품		100%	무상 하자처리		100%
미결업무 및 대책	내 용				대책 및 조치사항
협의사항
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용

프로젝트 인력 투입 현황

연번	성 명	사 업 참여율	투 입 일		지난 월 추진실적	금월 추진 계획
			금월	누적
1	정희근	65%	10	42	사업관리, 산출물 작성, 중간/완료보고, 관제시스템 설치 및 구성
2	심기석	40%	11	30	사업관리 및 품질관리
3	임상민	30%	11	21	기술지원 및 안정화 지원
4	지강혁	50%	17	53	슬라이딩 도어, 알림, 판넬PC 프로그램 개발	안정화 지원
5	서태양	65%	17	53	슬라이딩 도어, 알림, 판넬PC 프로그램 개발	안정화 지원
6	추교승	50%	0	21
7	이다운	80%	6	37	사업관리, RFID 태그 양산 및 납품	안정화 지원
8	곽승준	50%	0	16
9	서영민	80%	0	16
10	김정훈	80%	0	31