함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	위례신도시 임시급수 공급체계 변경 방침서 송부 및 협조요청

1. 배수과-5332호(2016.6.17.)와 관련입니다.

2. 『위례신도시 급수공급』과 관련하여 사업시행자인 LH공사로부터 임시급수 공급체계 변경요청이 있어 아래와 같이 공급체계를 변경하고자 하오니 관련부서에서는 붙임 1. 검토결과 보고서를 참조하시어 위례신도시의 급수공급이 안정적으로 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 위례신도시 임시급수 공급체계 변경

- 임시급수 변경 ┏ 현 재 : 광암정수장 수계 ⇒ 위례신도시

┗ 변 경 : 암사(저양정) 수계 ⇒ 위례신도시

- 추진순서 : 암사정수장 생산량 부담 감소를 위해 우선 뚝도 생산량 증산 및 암사 생산량 감소 조치 후 위례신도시 급수체계 변경

- 추진일정

▶ 뚝도 생산량 증대 및 암사 생산부담 감소	’16. 7.1. ~ 7.11.

▶ 급수체계 전환을 위한 시설물 합도점검	’16. 6.22.

▶ 암사(저양정) 공급관로 서서히 수계전환 시행	’16. 7.1. ~ 7.8.

▶ 암사(저양정) 공급계통으로 전환 완료	’16. 7.11. ~ 7.15.

▶ 유량계, 퇴수밸브 설치, 공급관로 2개소 연결시행	’16. 7. ~ 8.

- 기타 상세내용 및 관련부서별 협조사항 : 붙임 1. 문서 참조

따로붙임 : 위례신도시 임시급수 공급체계 변경요청에 대한 검토결과서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	대외협력과장,생산관리과장,시설과장,강동수도사업소장,광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장
주무관			배수과장			급수부장
협조자
시행	배수과-5376	(	2016.6.17.	)	접수	급수운영과-11374	(	2016.6.20.	)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개