- 위례신도시 8호선 추가역 건설관련 -

궤도분야 관급자재 구매 현황 여건 보고

1		관련근거

▢ 궤도2사업소-276호(‘19.01.11)

“위례신도시 8호선 추가역 궤도분야 기본 및 실시설계용역 결과보고”

▢ 토목처-416호(‘19.01.16)

“ERP공사코드 생성 알림 【8호선 추가역 궤도구조 보강공사(관급자재 구매)】”

▢ 궤도2사업소-425호(‘19.01.17) “60kg K" 레일 구매관련 요청”

▢ HSHQ-SSK*******001호(‘19.01.16)

“60KgK 레일 구매관련 요청사항 회신의 건”

2		구매현황

▢ 공 사 명 : 위례신도시 8호선 추가역 궤도공사

▢ 공사기간 : 2019년 4월~10월(약7개월)

▢ 관급자재 :

구분	품명	규격	단위	수량	비고
관급자재	레일	60KgK, L=20m	개	54
	PC침목	콘크리트	개	918
	깬자갈	도상자갈Ø22.4~63mm	㎥	1,107

※ 관급자재 구매기간 : 2019. 1월~3월(약3개월)

3		문 제 점

▢ 궤도공사 시행 전 관급자재 구매 어려움 발생

▢ `19년내 공사 준공을 위한 레일 규격 변경

4		검 토

▢ 궤도공사 시행 전 관급자재 구매 어려움 발생

- 관급자재 구매기간은 당초 `19.1월 ~ 3월이며 구매 자재는 레일, 침목(콘크리트), 깬 자갈 으로서, 레일에 대한 구매를 생산자(현재제철)에게 구매 문의한 결과,

- 60KgK, L=20m 레일은 서울교통공사 단독 사용 규격으로서 `19년도 사용분에 대한 주문량이 접수되지 않아 생산계획이 없고, 주문생산시 최소 주문량은 규격별 1,500~2,000톤으로(1,250~1,666개) 54개는 주문량이 충족되지 않아 생산 불가

▢ `19년내 공사 준공을 위한 레일 규격 변경

- 가장 빠르게 생산 가능한 제품으로서는 60KgKR, L=20m 으로서 `19년도 4월 이후에 납기 가능함.

▢ 검토결과

- 위례신도시 추가역 건설 궤도공사는 추가역 건설 전 시행해야되는 공사로서 관급자재인 레일의 경우 당초 규격(60KgK, L=20m)으로 구매시 `19년 9월~10월에나 납품가능하여 궤도공사 준공이 2020. 5월에나 준공이 될 것으로 판단됨.

- 따라서 위례신도시 지역 주민의 민원해소와 `19년내 공사 준공을 위해서는 당초 레일 규격을 전국 철도에서 사용중인 규격(하남선 연장선 60KgKR 레일 부설중)으로 변경하여 구매 추진하는 것이 타당하다고 판단됨.

5		결론 및 건의

상기와 검토한 바와 같이 위례신도시 지역 주민의 민원해소와 `19년내 공사 준공을 위해서 당초 레일 규격 변경 구매 추진을 건의합니다.

별 첨  레일 종류별 기하학적 형상 및 특성 검토.  끝.