운영⋅관리기준 준수예외 분기별 추진계획

(2017. 4. 1~6.30)

□ 기 관 명 : 중랑물재생센터

□ 예외기간 : 2017. 1. 1. ~ 3. 15.

□ 수질 예외항목 및 수질기준 상한선 : T-P 1.0mg/L

□ 약품주입율 및 TMS 총인(T-P) 현황

○ 2017.4.1. ~ 6.30. 기간중 운영현황 : 붙임 엑셀자료 참조

□ 총인처리시설 사업계획 및 추진사항

○ 총인처리시설 사업계획

- 시 설 용 량  : 159만㎥/일

- 총인시설용량 : 41.2만㎥/일(일부용량 총인처리 후 혼합방류)

- 사 업 기 간  : 2015.7월~2019.12월

- 총인처리공법 : 약품응집부상 총인처리공법

○ 추진사항 및 향후계획

- ’13.12 ~ ’14.10 : 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 타당성 조사 및 기본계획용역 완료, 사업시행계획 방침서 수립, 투자심사

- ’14.11 ~ ’15. 6 : 기본 및 실시설계용역 발주, 업체선정

- ’15. 7 ~ ’17. 2 : 기본 및 실시설계

- ’17. 3 ~ ’17. 9 : 사전 행정절차 이행(계약심사), 공사발주 및 계약

- ’17.10 : 총인처리시설 설치공사 착공(예정)

□ 총 사업비 및 재원조달 계획

○ 총 사업비 : 525억원

합 계	기투자	2017년	2018년	2019년이후
525	16	160	239	110

○ 재원조달 계획

- 법적 방류수 수질기준 준수를 위한 사업으로 타 사업에 우선하여 예산편성

(‘2018년도 239억 예산편성)

- 조속한 사업추진을 위하여 국비지원 지속건의

운영⋅관리기준 준수예외 분기별 추진계획

(2017. 4. 1~6.30)

□ 기 관 명 : 난지물재생센터

□ 예외기간 : 2017. 1. 1. ~ 3. 15.

□ 수질 예외항목 및 수질기준 상한선 : T-P 1.0mg/L

□ 약품주입율 및 TMS 총인(T-P) 현황

○ 2017.4.1. ~ 6.30. 기간중 운영현황 : 붙임 엑셀자료 참조

□ 총인처리시설 사업계획 및 추진사항

○ 총인처리시설 사업계획

- 시 설 용 량  : 86만㎥/일

- 총인시설용량 : 43.9만㎥/일(일부용량 총인처리 후 혼합방류)

- 사 업 기 간  : 2015.7월~2019.12월

- 총인처리공법 : 약품응집여과(YDF) 총인처리공법

○ 추진사항

- ’13.12 ~ ’14.10 : 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 타당성 조사 및 기본계획용역 완료, 사업시행계획 방침서 수립, 투자심사

- ’14.11 ~ ’15. 6 : 기본 및 실시설계용역 발주, 업체선정

- ’15. 7 ~ ’17. 2 : 기본 및 실시설계

- ’17. 3 ~’17.12 : 사전 행정절차 이행(계약심사, 개발제한구역 관리계획 변경, 도시계획 실시계획인가, 행위허가, 투자심사), 공사발주 및 계약

- ’18. 2 : 총인처리시설 설치공사 착공(예정)

□ 총 사업비 및 재원조달 계획

○ 총 사업비 : 531억원

합 계	기투자	2017년	2018년	2019년
531	12	119	179	221

○ 재원조달 계획

- 법적 방류수 수질기준 준수를 위한 사업으로 타 사업에 우선하여 예산편성

(‘2018년도 179억 예산편성)

- 조속한 사업추진을 위하여 국비지원 지속건의

운영⋅관리기준 준수예외 분기별 추진계획

(2017. 4. 1~6.30)

□ 기 관 명 : 탄천물재생센터

□ 예외기간 : 2017. 1. 1. ~ 3. 15.

□ 수질 예외항목 및 수질기준 상한선 : T-P 1.0mg/L

□ 약품주입율 및 TMS 총인(T-P) 현황

○ 2017.4.1. ~ 6.30. 기간중 운영현황 : 붙임 엑셀자료 참조

□ 총인처리시설 사업계획 및 추진사항

○ 총인처리시설 사업계획

- 시 설 용 량  : 90만㎥/일

- 총인시설용량 : 45만㎥/일(일부용량 총인처리 후 혼합방류)

- 사 업 기 간  : 2015.7월~2019.12월

- 총인처리공법 : 약품응집부상 총인처리공법

○ 추진사항 및 향후계획

- ’13.12 ~ ’14.10 : 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 타당성 조사 및 기본계획용역 완료, 사업시행계획 방침서 수립, 투자심사

- ’14.11 ~ ’15. 6 : 기본 및 실시설계용역 발주, 업체선정

- ’15. 7 ~ ’17. 2 : 기본 및 실시설계

- ’17. 3 ~ ’17. 9 : 사전 행정절차 이행(계약심사), 공사발주 및 계약

- ’17.10 : 총인처리시설 설치공사 착공(예정)

□ 총 사업비 및 재원조달 계획

○ 총 사업비 : 525억원

합 계	기투자	2017년	2018년	2019년이후
525	17	160	239	109

○ 재원조달 계획

- 법적 방류수 수질기준 준수를 위한 사업으로 타 사업에 우선하여 예산편성

(‘2018년도 239억 예산편성)

- 조속한 사업추진을 위하여 국비지원 지속건의

운영⋅관리기준 준수예외 분기별 추진계획

(2017. 4. 1~6.30)

□ 기 관 명 : 서남물재생센터

□ 예외기간 : 2017. 1. 1. ~ 3. 15.

□ 수질 예외항목 및 수질기준 상한선 : T-P 1.0mg/L

□ 약품주입율 및 TMS 총인(T-P) 현황

○ 2017.4.1. ~ 6.30. 기간중 운영현황 : 붙임 엑셀자료 참조

□ 총인처리시설 사업계획 및 추진사항

○ 총인처리시설 사업계획

- 시 설 용 량  : 163만㎥/일

- 총인시설용량 : 73.7만㎥/일(일부용량 총인처리 후 혼합방류)

- 사 업 기 간  : 2015.7월~2020.4월

- 총인처리공법 : 약품응집침전 총인처리공법

○ 추진사항 및 향후계획

- ’13.12 ~ ’14.10 : 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 타당성 조사 및 기본계획용역 완료, 사업시행계획 방침서 수립, 투자심사

- ’14.11 ~ ’15. 6 : 기본 및 실시설계용역 발주, 업체선정

- ’15. 7 ~ ’17. 2 : 기본 및 실시설계

- ’17. 3 ~ ’17. 9 : 사전 행정절차 이행(계약심사), 공사발주 및 계약

- ’17.10 : 총인처리시설 설치공사 착공(예정)

□ 총 사업비 및 재원조달 계획

○ 총 사업비 : 890억원

합 계	기투자	2017년	2018년	2019년이후
881	25	181	335	340

○ 재원조달 계획

- 법적 방류수 수질기준 준수를 위한 사업으로 타 사업에 우선하여 예산편성

(‘2018년도 335억 예산편성)

- 조속한 사업추진을 위하여 국비지원 지속건의