(주) 용   진   기   전

주소: 서울시 종로구 창신동 130-126   전화: (02) 2205-4005전송:0303-0799-1123

선결				지시
접수	일자 시간
				결 재 · 공 람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호  2014-1 -16

시행일자   2014.  1.   .

수    신   서울특별시 물재생시설과장

참    조

제    목   납품기한 연기 요청

1.  서울시와 계약체결하여 시행하고 있는 서남물재생센터 제1처리장 음폐수 투입 및 악취방지시설 설치공사내 음폐수 저장조(FRP) 제작구매 설치건에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청 드립니다.

가. 사업개요

○ 건    명 : 음폐수 저장조(FRP) 제작구매 설치

○ 계 약 자 : ㈜용진기전

○ 계약금액 : 173,669,800원

○ 납품기한 : ‘14. 01. 25

나. 변경사항

○ 변경 납품기한 : ‘14. 02. 21

○ 사유 : 선행공정인 음폐수 투입시설 등의 지연으로 설치가 완료 되었으나 시험운전이 불가하여 납품기한을 연기하고자 합니다.

○ 계약금액 : 변경 없음.

첨부 : 1. 납품연기 동의서  1부.

2. 설치완료 사진    1부.  끝.

2014 년   1 월     일

납품기한 연기 동의서

당사는 귀 시와 계약 체결한 공사의 관급자재인 음폐수 저장조(FRP) 제작구매 설치건에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기함에 동의합니다.

1. 수요기관 : 서울특별시 물재생시설과

2. 계 약 자 : ㈜용진기전

3. 계약금액 : 173,669,800원

4. 납품현장 : 서남물재생센터 내

5. 동의 내용

1) 납품기한

당 초	변 경	사 유
‘14. 01. 25	‘14. 02. 21	선행공정(음폐수 투입시설 등) 지연에 따라 시험운전 불가로 연기

2) 계약금액 : 변경 없음.

2014. 1. 16

서울특별시장 귀하

음폐수 저장조 설치 완료 사진

전실내 음폐수 저장탱크