품질시험계획의 이행확인 의뢰서

문서번호 :                                          시행일자 : 2015년  02월   10일

수    신 : 서울특별시품질시험소장                  발    신 : 도시기반시설본부장

제    목 : 2015년 품질시험 이행확인 의뢰           주    소 : 서울 중구 청계천로 8

프리미어 플레이스 빌딩 13층

『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한조례』제11조 제4항의 규정에 의하여 아래와

같이 품질시험계획의 이행확인을 의뢰합니다.

공 사 명	돈화문 국악예술당 건립공사(건축)
공 사 개 요	대지면적 : 947.80㎥ 지역지구 : 도시지역, 문화재보호구역, 일반상업지구 용 도 : 문화 및 집회시설(공연장) 구 조 : 지상 – 한식목구조, 지하 – 철근콘크리트조 규 모 : 지하 3층, 지상1층 연 면 적 : 1,788.98㎥
발 주 자	서울시 도시기반시설본부 ( 담당부서: 건축부, 전화 : 02-3708-2630 )
감 리 자	영화키스톤 건축사 사무소 ( 현장전화 : 02-763-7905 ) (팩스번호 : 02-763-7907 )
시 공 자	정오종합건설(주) ( 현장전화 : 02-743-3734 ) (팩스번호 : 02-743-3735 )
총 공 사 비	5,959,305,000 원
공 사 기 간	2013 년 12 월 17 일 ～ 2015 년 10 월 16 일
현 공 정	38.45 % (토목 공종 진행중)
※ 첨부서류 : 1. 품질시험계획서 1부(추후 점검시 제출) 2. 당해 공사시방서(특별시방서 포함) 1부(추후 점검시 제출). 끝.

공사 현황 작성 양식 (현장기동반)

공    사    명

돈화문 국악예술당 건립공사

공  사  개  요

대지면적 : 947.80㎥

지역지구 : 도시지역, 문화재보호구역, 일반상업지구

용    도 : 문화 및 집회시설(공연장)

구    조 : 지상 – 한식목구조, 지하 – 철근콘크리트조

규    모 : 지하 3층, 지상1층

연 면 적 : 1,788.98㎥

발 주 자

서울시 도시기반시설본부

( 담당부서: 건축부,  전화 : 02-3708-2630 )

감 리 자

영화키스톤 건축사 사무소

( 현장전화 : 02-763-7905 ) (팩스번호 : 02-763-7907 )

시 공 자

정오종합건설(주)

( 현장전화 : 02-743-3734 ) (팩스번호 : 02-743-3735 )

총 공 사 금 액

(보상비제외)

5,959,305,000 원

공 사 기 간

2013 년 12 월 17 일 ～ 2015 년 10 월 16 일

현  공  정

(주요공종 및 공정율)

- 주요공종

공 종	예정공사기간	비 고
토공	2014. 7 ~ 2015. 2
철근콘크리트(골조)	2015. 3 ~ 2015. 5
내부마감등	2015. 6 ~ 2015. 10

- 공정율 : 38.45%

현장위치도

현장사무실

현장

돈화문

←안국역

↓종로3가역