김 수 규 의원(교육위원회, 더불어민주당)

1. 면목선 사업 진행현황

- 국토부 사전협의/승인 및 예비타당성조사 진행사항 등을 중심으로

2. 면목선 계획설계 자료

- 면목선 시설 및 구조물 등의 스케치

3. 면목선 추진관련 향후 일정

1. 면목선 사업 진행현황

○ ’19. 2.20  제2차 서울시 도시철도망구축계획(안) 대시민 발표

- 면목선 등 4개 노선에 대해 민자→재정사업 전환

○ ’19. 3.~4. 권역별 주민설명회(3회) 및 공청회 개최(1회)

○ ’19. 2.~5. 국토교통부 사전협의 완료

○ ’19. 6. 7.  추가 설명회 개최

○ ’19. 7.19. 제2차 서울시 도시철도망구축계획(안) 승인요청(→국토부)

2. 면목선 계획설계 자료

○ 면목선 시설 및 구조물 등의 스케치는 향후 철도망계획 확정고시 및 예비타당성 조사 이후 ‘기본계획 수립’단계에서 구체적인 사항이 결정될 예정임

3. 면목선 추진 관련 향후 일정

○ 도시철도망 구축계획 승인(국토교통부) 이후 예비타당성 조사 신청예정

절차		예비타당성 조사	→	노선별 기본계획 수립	→	기본 및 실시설계	→	보상 및 착공
(소요기간)		1.0~1.5년		1.0~1.5년		2.0년

※ 예타신청 후 착공까지 최소 4~5년 소요되나 경제적 타당성 확보 여부, 관계기관 협의일정 등에 따라 소요기간이 증가될 수 있음

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	이 기 웅
	☎2133-2243	주무관	오 인 숙
	작 성 일 : 2019.7.