문서번호	입법담당관-30
결재일자	2014.1.3.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	의정조사팀장	입법담당관		시의회사무처장
협 조
	의정담당관
	시설관리팀장
	★입법정책팀장

의정활동공동연구실 공간 재배치 활용계획

2014. 1

서울특별시의회

(입법담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

「의정활동공동연구실」공간 재배치 활용계획

의정활동공동연구실의 공간 재배치를 통하여 정책연구보고회 및 연구용역 심사 등을 진행할 수 있는 다목적회의실을 확보하여 효율적인 업무추진을 도모하고자 함

1		현황과 문제점

□ 운영현황

○ 명   칭 : 의정활동공동연구실

○ 위치 및 면적 : 103.67㎡(서소문별관 2동 6층 - 舊 도시안전위원회실)

○ 용   도 : 정책지원 공동연구실

□ 문 제 점

○ 의정활동공동연구실 설치 시 舊 도시안전위원회실 시설 공간의 일부를 존치하며 조성하여 불필요한 공간 보유 – 약25.7㎡(전체 면적의 24.7%)

- 음향실(11.7㎡), 의원활용 공간(14.0㎡)존치

○ 정책연구 보고 및 각종 현안업무 용역 검토 보고회 등을 진행할 상시 활용 가능한 다목적 회의실이 없어 업무추진 어려움

- 용역업무 : 연 20건 내외(연 80여회 검토 보고회 진행)

2		추진계획

□ 추진기간 : 2014. 1. 3. ~ 2.20

□ 추진장소 : 의정활동공동연구실(서소문별관 2동 6층)

□ 추진내용 : 의정활동공동연구실 내 공간재배치를 통한 다목적 회의실조성

○ 다목적 회의실 조성 23.8㎡(총 면적 변동 없음) - 붙임 배치도 참조

□ 추진방법

○ 시설 공사 : 구(舊) 음향실 및 의원활용 공간 벽체 철거 후 회의실 공간조성

○ 물품 구매 : 회의실용 탁자, 의자, TV, 이동식 프로젝터, 노트북 등(개별구매)

□ 추진일정(예정)

○ 2014. 1. 6                시설공사 계약(예정)

○ 2014. 1. 6 ~ 2.20        공간 재배치 시설공사 및 물품설치

○ 2014. 2.20                공사완료

□ 소요예산 : 총65,000천원

○ 시설비 : 20,000천원

- 예산과목 : 의정담당관, 의회운영강화 및 의회청사시설의 안정적관리, 의회청사환경개선, 의회청사 시설개선, 시설비

○ 물품 및 자산취득비 : 45,000천원(기 구매 - 2013년 예산 )

- 예산과목 : 입법담당관, 입법활동지원기능강화, 입법활동지원사업, 의정발전지원센터운영,  물품 및 자산취득비

3		행정사항

□ 의정활동공동연구실 공간 재배치에 따른 시설공사 : 의정담당관 협조

□ 공사 시행 시 자재운반에 따른 불편사항 및 소음발생을 최소한으로 억제하는 등 민원 발생 사전차단 조치