현재 공사중단 사업 현황

연번	공사명	공구	총공사비 (백만원)	중단사유	공사중단기간 (개월 수)	공정율	준공일자 최초/변경	공사중단으로 인한 추가비용
1	신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)	1공구	221,800	예산 미확보에 따른 공사중지	2010.10 ~ 2014.9 (48개월)	1%	2017.12 / 변경없음	없음
2	동부간선도로 확장공사 (1공구)	1공구	35,800	경원선 철도이설에 따른 공사 중지	2012.1 ~ 2014.12 (36개월)	23%	2011.9 / 2016.12	없음
3	신상도 지하차도 확장공사	-	9,261	주택재개발정비구역 해제에 따른 도로편입부지 미확보로 공사중지	2010.12 ~2014.3 (40개월)	24%	2010.4 / 2015.12	없음
4	잠원 2빗물펌프장 신설공사	-	30,165	압구정동 신현대 아파트 주민들의 펌프장 설치 반대에 따른 공사중지	2014.1 ~2014.9 (9개월)	5%	2014.7 /2015.12	없음
5	마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사	-	18,302	마곡지구 택지개발사업의 도시계획 변경으로 재생수 공급시기 변경(‘14.10∼ ’16.6)되어 기계,전기분야 공사정지	2014.6 ~2014.12 (6개월)	72%	2013.10 2016.7	없음