사고이월 사업별명세서

○ 사업명 : 수색동 308일대 도시재생활성화사업구간내 노후하수관로개량	부 서 명	물재생계획과
○ 용역기간 : 2017.12.15 ～ 2019. 12. 14.	작 성 자	시설6급 성명 김상훈
	예 산 담 당	직 성명

○ 예산과목(사업코드 :         )

(관) 자본적지출 (항) 유형자산취득 (세항) 구축물 (목) 시설비 및 부대비 (세목) 시설비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
1,000,000	2018.4.19 2018.5.11	1,000,000	계		343,600		171,800		171,800 (0)
			용 역 비		343,600		171,800		171,800
				도 급 비
				관 급 비
			보 상 비
			이전비․기타

○ 이월사유

- 월류수질대책 수립을 위한 기존관로 상태불량으로 대체노선 검토기간 소요

- 대체노선 확보 어려움으로 하수도법 시행규칙 개정을 통한 분뇨 직투입에 따른 월류수 대책을 제외하는 방안으로 방침 결정하여, 시행규칙 개정기간을 감안한 용역기간 연장으로 계약금액 사고이월 필요

○ 착공연월일 : 2017.12.20                      ○ 최초준공연월일 : 2018.12.14

( - 1차연기 준공 연월일 : 2019.12.14                - 최종준공연월일 : 2019.12.14 )

지출원인행위 미필 이월사유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 사 업 명 : 수색동 308일대 도시재생활성화사업구간내 노후하수관로개량

○ 예산과목

(관) 자본적지출 (항) 유형자산취득 (세항) 구축물 (목) 시설비 및 부대비 (세목) 시설비

○ 지출원인행위 미필대상 총액 :  656,400,000원

○ 지출원인행위 미필 이월금액 :  656,400,000원

○ 이월액 산출내역

- 사업예산 1,000,000천원

· 원인행위(용역비) : 343,600천원(지출, 171,800, 사고이월 171,800)

· 원인행위미필(공사비) : 656,400천원

○ 이월사유 (구체적으로 기술)

- 2018년 사업비는 Fast Track 방식으로 용역시행과 더불어 월류수 대책수립을 위한 관로공사비 일부를 편성하였으나, 기존관로의 사용이 불가하여 대체노선 검토기간 소요 등으로 실시설계를 완료하지 못함

- 실시설계를 위한 시험시공 등 설계완료이전  소요되는 비용확보 및 설계완료 후 조속한 시범사업 완료를 위하여 건설개량이월 필요

<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 노후기반시설(하수관로)실태평가 용역	부 서 명	물재생계획과
○ 용역기간 : 2018. 12.18 ～ 2020 . 2 .10.	작 성 자	시설6급 성명 김상훈
	예 산 담 당	직 성명

○ 예산과목(사업코드 :         )

(관) 사업비용 (항) 영업비용 (세항) 관거비 (목) 연구개발비 (세목) 연구용역비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
400,000	2018.9.28	396,000	계		376,200		0		376,200 ( )
			용 역 비		376,200		0		376,200
				도 급 비
				관 급 비
			보 상 비
			이전비․기타

○ 이월사유 : 안전총괄과에서 일괄 작성된 과업지시서(‘18.7월)에 의거 입찰공고를 추진하였으나 발주기간으로부터 절대과업기간이 부족하여 사고이월추진

○ 착공연월일 :  2018. 12. 18                ○ 최초준공연월일 : 2020.2. 10

첨부 : 1. 지출원인행위 미필 이월사유서 양식 1부.

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 하수도 정책자문단 운영	부 서 명	물재생계획과
○ 사업기간 : 2018.12.14～ 2019.12.13.	작 성 자	임기제시설6급 윤혜선
	예 산 담 당	행정6급 홍승현

○ 예산과목(사업코드 : 000006)

(관) 사업비용 (항) 영업비용 (세항) 일반관리비 (목) 일반운영비 (세목) 사무관리비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분	지출원인행위액	지 출 액	사고이월액
233,000	′18.11.15	233,000	계	232,876	22,876	210,000
			용 역 비	210,000	-	210,000
			기 타	22,876	22,876	-

○ 이월사유

- 사고이월 요구금액은 “하수도 정책자문단(2기) 운영 및 정책구상 마련” 용역비임

- 정책자문단 구성(′18.6.30 1기 임기 만료 및 ′18.10.29 2기 발족) 및 2회 유찰에 따른 수의계약 등의 지연사유로 ′18.12.14 용역계약됨

- 잔여용역기간에 따라 지급시기가 미도래하여 시고이월 요청

○ 착공연월일     : ′18.12.14

○ 최초준공연월일 : ′19.12.13

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : CSOs 저감을 위한 하수도시설 개선 타당성조사 및 기본계획	부 서 명	물재생계획과
○ 사업기간 : 2018.4.11～ 2019.10.02.	작 성 자	임기제시설6급 윤혜선
	예 산 담 당	행정6급 홍승현

○ 예산과목(사업코드 : 000008)

(관) 자본적지출 (항) 비가동설비자산취득 (세항) 건설중인자산 (목) 시설비 및 부대비

(세목) 시설비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분	지출원인행위액	지 출 액	사고이월액
500,000	′18.02.19	500,000	계	500,000	200,000	300,000
			용 역 비	500,000	200,000	300,000

○ 이월사유

- 사고이월 요구금액은 용역비임

- ´18.11.30 기준 공정율 23.25%(실적/계획 : 106.9%)로 정상 추진중이며 공정율 및 잔여용역기간에 따라 지급시기가 미도래 하여 사고이월 요청

※ 총 사업비 1,043백만원

○ 착공연월일     : ′18. 4.11

○ 최초준공연월일 : ′19.10.02

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 서울형 하수도 시뮬레이션 인자 영향도 실증 용역	부 서 명	물재생계획과
○ 사업기간 : 2018.10.25～ 2019.12.24.	작 성 자	임기제시설6급 윤혜선
	예 산 담 당	행정6급 홍승현

○ 예산과목(사업코드 : 000010)

(관) 사업비용 (항) 영업비용 (세항) 일반관리비 (목) 연구개발비  (세목) 연구용역비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분	지출원인행위액	지 출 액	사고이월액
200,000	′18.09.12	200,000	계	200,000	-	200,000
			용 역 비	200,000	-	200,000

○ 이월사유

- 사고이월 요구금액은 용역비임

- 서울기술연구소 신규설립에 따른 수탁과제 협의 결렬 및 2회 유찰에 따른 수의계약 등의 지연사유로 ′18.10월말 용역계약됨

- 잔여용역기간에 따라 지급시기가 미도래하여 시고이월 요청

○ 착공연월일     : ′18.10.25

○ 최초준공연월일 : ′19.10.24

- 1차연기준공연월일 : ′19.12.24

※ 준공연기사유 : 발주과정(입찰공고~계약)에서 발생한 오류를 정정하여 ′18.9월 학술용역심의회 상정‧의결된 계약기간 등과 부합토록 용역수행기간 확