<서식 2>

2016 회계연도 사고이월 명세표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

경리관 : 직 뚝도아리수정수센터소장 성명 최석기 (인)

사업주관과장 : 직 정수시설과장     성명 윤종민 (인)

작 성 자 : 직 정수시설과            성명 변병수 (인)

(단위 : 천원)

사 업 명 (사업코드)	2016 회계연도 예산					지 출 원 인 행 위 (2016.12.31 기준)			지 출 액 (2016.12.31 기준)		2017 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	예산편성별 (당초․추경)
	과목코드	목 (세목)	예산현액	배정액	배정 월일	월일	금 액	준 공 예정일	월일	금액	과목코드	목 (세목)	이월액	준 공 예 정 연월일
뚝도정수센터 정수지(#3) 내부 방수방식공사	214-05	수선유지교체비	1,778,810	1,778,810	16.01.02	16.10.18	1,547,130	’17.01.20	‘16.12.26	1,027,367	214-05	수선유지교체비	519,763	’17.1.20	231,680	PDF 도류벽 판넬 세척(신규공종) 시공에 대한 추가 공사기간이 필요하여 이월	당초

※ 1. 이월액은 총 사고이월 금액을 기재하되, 지출원인행위 미필이월액은 이월액란에 (  )로 별도 명기할 것.

2. 지출원인행위와 지출액이 수회에 걸쳐 이루어진 경우 최초～최종월일 기재하고, 지출금액은 총금액으로 기재

3. 이월사유란에는 당해사업 이월사유와 함께 미필이월 요지를 함께 명시할 것.

4. 사업코드는 5자리(예 : 뚝도정수센터 고도정수처리 건설공사 11105) 과목코드는 6자리(예 : 구축물, 시설비 234-401)표기