<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사(6차공사)	시설안전부장	이 규 상 (인)
	고도정수반장	남 정 열 (인)
○ 공사기간 : 2014. 1. 7. ～ 2015. 4. 20.	작 성 자	시설6급 이 재 학 (인)
	예 산 담 당 (부)	행정7급 오 환 석 (인)

○ 예산과목(사업코드 : 11103  )

(관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)구축물 (목)시설비 및 부대비 (세목)시설비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
31,922,001	’14.1.1.~ ’14.12.18.	31,922,001	계		31,922,000		27,396,623		4,525,377 ( - )
			공 사 비		31,922,000		27,396,623		4,525,377
				도 급 비		31,922,000		27,396,623		4,525,377
				관 급 비
			보 상 비
			이전비․기타

○ 이월사유 : 추가공사 시행에 따른 공사비 증액 및 공사기간 연장

- 추가공사

‧ 대현산배수지 송수관 비상관로(이중화) 부설 : D1200~1350mm, L=298m

‧ 양진초‧중학교 진입도로 월편 울타리(휀스) 이전설치 : L=180m, H=3m

- 공사비 변경 : 50,911,687천원 → 51,948,687천원(증 1,037,000천원)

○ 착공연월일 :  2014. 1. 8.                ○ 최초준공연월일 : 2014.12.20.

( - 1차연기준공연월일 : 2015. 4.20.    - 최종준공연월일 : 2015. 4.20.)

첨부 : 1. 관급자재 구매액 일자별 현황 양식 1부.

관급자재 구매액 일자별 현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 사 업 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사(6차공사)

(단위 : 원)

일 자 별	구 매 액	비 고 (구매내용)
	없음(턴키공사)

<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 건설 폐기물처리용역(추가발주분 3차)	시설안전부장	이 규 상 (인)
	고도정수반장	남 정 열 (인)
	작 성 자	시설6급 이 재 학 (인)
○ 용역기간 : 2014. 2. 4. ～ 2015. 4. 20.	예 산 담 당 (부)	행정7급 오 환 석 (인)

○ 예산과목(사업코드 : 11103)

(관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)구축물 (목)시설비 및 부대비 (세목)시설비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
372,456	’14.2.11.	372,456	계		372,456		205,834		166,622 ( - )
			용 역 비		372,456		205,834		166,622
				도 급 비		372,456		205,834		166,622
				관 급 비
			보 상 비
			이전비․기타

○ 이월사유 : 추가공사 시행에 따른 공사기간 연장으로 폐기물 처리용역 기간 연장

- 추가공사

‧ 대현산배수지 송수관 비상관로(이중화) 부설 : D1200~1350mm, L=298m

‧ 양진초‧중학교 진입도로 월편 울타리(휀스) 이전설치 : L=180m, H=3m

- 용역비 변경 : 변경없음(372,456천원)

○ 착공연월일 :  2014. 2. 4.                ○ 최초준공연월일 : 2014.12.20.

( - 1차연기준공연월일 : 2015. 4.20.   - 최종준공연월일 : 2015. 4.20. )

<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 구의정수센터 고도정수처리시설 및 재건설공사 건설사업관리 (CM)용역(7차분)	시설안전부장	이 규 상 (인)
	고도정수반장	남 정 열 (인)
	작 성 자	시설6급 이 재 학 (인)
○ 용역기간 : 2014. 1. 2. ～ 2015. 4. 30.	예 산 담 당 (부)	행정7급 오 환 석 (인)

○ 예산과목(사업코드 : 11103  )

(관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)구축물 (목)시설비 및 부대비 (세목)감리비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
803,785	’14.1.1.~ ’14.12.18.	803,785	계		803,785		626,000		177,785 ( - )
			용 역 비		803,785		626,000		177,785
				도 급 비		803,785		626,000		177,785
				관 급 비
			보 상 비
			이전비․기타

○ 이월사유 : 공사기간 연장에 따른 건설사업관리용역 기간 연장 및 용역비 증가

- 추가공사

‧ 대현산배수지 송수관 비상관로(이중화) 부설 : D1200~1350mm, L=298m

‧ 양진초‧중학교 진입도로 월편 울타리(휀스) 이전설치 : L=180m, H=3m

- 용역비 변경 : 1,027,000천원 → 1,204,785천원(증 177,785천원)

○ 착공연월일 :  2014. 1. 2.                ○ 최초준공연월일 : 2014.12.18.

(- 1차연기준공연월일 : 2015. 1.20.  - 2차연기준공연월일 : 2015. 4.30.  - 최종준공연월일 : 2015. 4.30.)

<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사(6차공사)	시설안전부장	이 규 상 (인)
	고도정수반장	남 정 열 (인)
○ 공사기간 : 2014. 1. 7. ～ 2015. 4. 20.	작 성 자	시설6급 이 재 학 (인)
	예 산 담 당 (부)	행정7급 오 환 석 (인)

○ 예산과목(사업코드 : 11103  )

(관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)건물 (목)시설비 및 부대비 (세목)시설부대비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
7,000	’14.4.1.	7,000	계		-		-		7,000 ( 7,000 )
			공 사 비
				도 급 비
				관 급 비
			보 상 비
			이전비․기타		-		-		7,000 ( 7,000 )

○ 이월사유 : 당 공사 외부전문가 자문비용 및 준공행사 소요비용 확보

○ 착공연월일 :  2014. 1. 8.                ○ 최초준공연월일 : 2014.12.20.

( - 1차연기준공연월일 : 2015. 4.20.    - 최종준공연월일 : 2015. 4.20.)

첨부 : 1. 지출원인행위 미필 이월사유서 1부.

지출원인행위 미필 이월사유서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 사 업 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 예산과목

- (관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)건물 (목)시설비 및 부대비 (세목)시설부대비

○ 지출원인행위 미필대상 총액 : 7,000,000원

○ 지출원인행위 미필 이월금액 : 7,000,000원

○ 이월액 산출내역

- 외부전문가 자문비용  : 1,500,000원(150,000 × 10인)

- 준공식 행사 부대비용 : 5,500,000원

‧ 팜플렛 및 현황판 제작 등 : 3,000,000원

‧ 기타비용 : 2,500,000원

○ 이월사유

- 당 공사의 추진예정 공정이 시민들에게 개방하는 조경 및 주민친화시설 설치이므로 향후 지역주민들의 이견이 발생할 개연성이 있어 이에 대한 외부전문가 자문이 필요할 것으로 예상됨.

- 명년 4월 20일 공사 준공시 준공식 행사가 있을 예정이므로 이에 대한 소요경비 확보가 필요함.

2015.  1.   .

작성자 : 고도정수반  시설6급  이 재 학 (인)

확인자 : 시설안전부장         이 규 상 (인)