사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 : 우면산가압장 급수체계 개선	급 수 부 장	이 규 상 (인)
※ 용역명 : 우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역	계획설계과장	이 임 섭 (인)
○ 용역기간 : 2016. 5. 2.～ 2016. 12. 27.	작 성 자	시설6급 최 영 서 (인)
	예 산 담 당	행정7급 문 정 혜 (인)

○ 예산과목(사업코드 : 22104)

(관)자본적지출 (항)유형자산취득 (세항)구축물 (목)시설비및부대비 (세목)시설비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분	지출원인행위액	지 출 액	사고이월액
347,000	계	346,120	계	298,364	241,742	56,622
	’16. 2. 29.	328,620	설 계 비	283,107	226,485	56,622
	’16. 5. 4.	17,500	지반조사비	15,257	15,257	0

○ 이월사유 (육하원칙에 의거 구체적으로 기술)

- 공원 관리 부서와 업무 협의에 시일이 소요되었고 설계경제성등(설계VE) 검토 지연에 따라 검토 결과 반영을 위한 추가 기간이 필요하여 2개월 준공기한 연기

○ 착공연월일 : 2016. 5. 2.           ○ 최초준공연월일 : 2016. 12. 27.

( - 1차 연기 준공 연월일 : 2017. 2. 28.       - 최종 준공 연월일 : 2017. 2. 28.)