<서식 1>

사고이월 사업별명세서

○ 사 업 명 :뚝도정수센터 정수지(#3) 내부 방수방식공사	뚝도아리수정수센터	소장 최 석 기 (인)
○ 공사기간 : 2016. 8. 16 ～ 2017. 1. 20	정수시설과장	과장 윤 종 민 (인)
	작 성 자	시설6급 성명 변병수 (인)
	예산담당(사업소)	행정7급 성명 최희정 (인)

○ 예산과목(사업코드 : 12202)

(관)상수도사업비용 (항)영업비용 (세항)정수비 (목)수선유지교체비 (세목)기타교체비

(단위 : 천원)

예산현액	배정일자	배정액	구 분		지출원인행위액		지 출 액		사고이월액
1,778,810	‘15.1.2	1,778,810	계		1,547,130		1,027,367		519,763
			공 사 비		1,547,130		1,027,367		519,763
				도 급 비		1,547,130		1,027,367		519,763
				관 급 비
			보 상 비
			이전비․기타

○ 이월사유

- PDF 도류벽 판넬 세척(신규공종) 추가 시공에 따른 공사기간이 필요하여 이월

○ 착공연월일 : 2016. 8. 16            ○ 최초준공연월일 : 2016. 12. 30

(1차연기준공연월일 : 2017.1.20.)