행복플러스 작업장 설치사업 이월 요구서

단체명

□ 이월사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	‘13.예산액	‘14년 이월요구액	사 유
행복플러스 작업장 설치	1,600,000	1,598,980	공사가 ’13.07.22일 착수하여 2014.09.02일 준공 예정으로 이월이 필요함

□ 이월사업 설명서

○ 사업개요

- 사업목적 : 중증장애우의 일자리를 확대하고, 경쟁력있는 제품생산으로 장애우 근로자의 안정된 소득을 통한 지역사회 자립기반 강화 및 삶의 질 향상에 기여

- 사업기간 : 2012. 06.  ~ 2014. 09

- 총사업비 : 3,868백만원 (복권기금 : 3,868)

- 사업규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 1,407.38㎡, 노유자시설

○ 소요재원

(단위 : 천원)

재원별	총 사 업 비(예산액)					이월액 (복권기금)
	계	국비	복권기금	시군비	기타
	1,598,980		1,598,980

○ 이월사유(구체적으로 작성)

- 예산액은 행복플러스 작업장 설치공사를 위한 공사비로 현재 시공사와 계약하여 원인행위 된 상태로,

- 공사계약이 ’13.07.22일 공사를 착수 하여 2014.09.02일 준공 예정으로 공사비 지급을 위해 사고이월이 필요함

※ 본 공사는 공사차량 진입로가 없어 설계 및 시공에 어려움이 있어 일반 건축공사 현장보다 공사기간이 다소 많이 소요됨

○ 이월액 월별 지출 계획

- 2014. 04 : 300백만원

- 2014. 05 : 300백만원

- 2014. 06 : 300백만원

- 2014. 07 : 300백만원

- 2014. 08 : 300백만원