한강 이촌권역 자연성 회복사업

생태적 가치가 높은 한강 이촌권역을 대상으로 자연성 회복사업 추진 하여 한강 생태거점으로 조성하고자 함.

□ 추진방향

○  생태적 가치가 있는 주요 지역에 생태복원을 위한 자연하안 조성 및 생물서식처 복원, 천변습지 조성 등 자연성 회복 사업 추진

○  생태, 문화가 복합된 공간 조성으로 주변 지역주민 만족도 극대화 및 시정 신뢰도 향상 기여

□ 사업개요

○  위    치 : 이촌한강공원 (한강철교 북단 주변)

○  규    모 : 97,100㎡

○  사업기간 : 2014. 1 ~ 2016. 12

○  사업내용 : 자연형 호안 조성, 천변습지 및 저습지, 습지관찰대,

버드나무림 조성, 휴게쉼터, 다목적운동장 등

○  총사업비 : 7,000백만원 ('14년 : 500, '15년이후 : 6,500)

‣ 2014년 : 기본 및 실시실계용역, 환경영향평가 용역 시행

‣ 2015~16년 : 자연성 회복사업 공사 시행

□ 추진일정

○ 2014.  1.        : 사업계획 수립, 기술용역타당성 심의

○ 2014.  4 ~ 12  : 설계용역 시행

○ 2014. 11. ~     : 하천점용허가 신청 및 협의

○ 2015 ~ 2016년  : 시설공사 시행

□ 위 치 도

사업대상지

한강철교

한강대교

□ 기본구상(안)