문서번호

문화체육과-1870

★주무관

문화진흥팀장

문화체육과장

주민생활지원국장

등록일자

2014.01.27.

결재일자

2014.01.27.

공개여부

공개

협 조

이촌2동 마을 북카페 조성 총괄계획

용  산  구

(문화체육과)

이촌2동 마을 북카페 조성 총괄계획

지역주민들이 책과 함께 문화와 휴식을 누리며 소통할 수 있는 마을 커뮤니티 공간인 북카페를 조성하여 용산국제업무지구 재개발 계획 무산에 따른 주민 간 갈등을 해소하고 지역공동체를 회복할 수 있는 화합의 장으로 만들고자 함

Ⅰ

관 련 근 거

서울시 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례 제9조

용산구 마을공동체 지원 등에 관한 조례 제9조

Ⅱ

추 진 경 위

2013.10.29 마을 북카페 설치에 대한 주민건의 (서부이촌동 청책토론)

2013.11.22 마을 북카페 사업추진 주민대표 모집․선정

- 이촌2동 통장, 주민자치위원 간사, 은빛자원봉사단장

2013.12.10 마을 북카페 조성 및 운영지원 보조금 50,000천원 교부 (서울도서관)

Ⅲ

조 성 개 요

위    치 : 이촌2동주민센터 (용산구 이촌로18길 20)

규    모 : 90㎡(지하2층, 지상3층 건물 중 2층, 現 현장지원센터)

조성기간 : 2014. 3월 ~ 6월 (현장지원센터 철수 후 사업시행)

주요시설 : 도서열람, 주민쉼터, 열린 회의공간 등 주민소통의 장

조성방법 : 인테리어 리모델링, 도서비치 및 책장, 집기 등 설치

소요예산 : 140,000천원

Ⅳ

추 진 방 향

지역공동체 회복을 목적으로 민 ․ 관이 협력하여 마을 북카페 조성

누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공간으로서 주민 주도로 운영함

Ⅴ

주 요 기 능

지역공동체 회복을 위한 주민 커뮤니티센터로서의 기능

도서열람 등 지역주민의 지식정보센터로서의 기능

문화프로그램 등의 운영으로 평생교육 ․ 여가센터로서의 기능

지역주민 누구나 이용가능한 주민편의 및 휴식공간으로서의 기능

Ⅵ

조 성 계 획

1	조 성 위 치

위   치 : 이촌2동주민센터 2층 90㎡ 문화교실(現 현장지원센터)

세부위치 및 건축물 현황, 사진

옥탑(25.67㎡)
3층(523.38㎡)	다목적실(대강당)
2층(523.38㎡)	헬스장, 문화교실, 동대본부
1층(472.07㎡)	동민원실
B1층(819.63㎡)	주차장, 다목적실
B2층(844.97㎡)	주차장, 기계실, 전기실

【이촌2동주민센터 건축물 현황】

【외관】 이촌2동주민센터

【내부】 2층 문화교실(現현장지원센터)

선정사유 : 구유재산으로서 임대료의 부담이 없고 주민의 접근성이 높음

2	공간 조성 계획

조성개요

자유롭게 도서 열람 및 차를 마시며 휴식과 대화할 수 있는 공간으로 설치

지역주민의 소통증진을 위한 자유로운 분위기의 회의 및 프로그램실 설치

조성기간 : 2014. 3월 ~ 5월 (3개월간)

조성방법 : 운영주체와 협의하여 공사 및 시설 설치

시설별 면적(안)

구 분	면적(㎡)	주요기능
총 면적	90.0
도서열람 및 휴게공간	50.4	책을 읽고, 차를 마시며 대화하는 공간
회의 및 프로그램 공간	23.1	지역커뮤니티 활성화를 위한 소규모 회의, 독서 ․ 문화프로그램 등 운영공간
디지털 자료공간	6.6	PC를 통한 비도서자료 등 이용공간
안내 및 음료제공 공간	9.9	이용안내 및 차 등 음료제공 공간

Ⅶ

운 영 계 획

운영기간 : 2014. 6월 ~ 계속

운영방식

별도 위탁자를 두지 않고, 주민스스로 운영위원회를 구성하여 자율적으로 운영

일부 단체의 활동공간이 아닌 가능한 모든 주민이 활용할 수 있는 형태로 운영

도서열람 및 휴식 그 자체가 목적이 아닌, 이를 매개로 마을공동체 회복의  목적을 가지고 운영

상업적 용도를 일부 포함하더라도 주민 스스로 지속적으로 운영할 수 있도록 구성

운영위원회 구성 : 이촌2동 통장, 주민자치위원회, 은빛자원봉사단 등 직능 단체 회원, 학부모 등 관심있는 주민들의 자발적인 참여로 구성

Ⅷ

추 진 일 정

2014. 1월 ~ 2월 : 마을 북카페 운영위원회 구성

2014. 3월 ~ 5월 : 공간 리모델링 공사 및 집기구입

2014. 6월 중    : 마을 북카페 개소

2014. 6월 ~ 12월 : 마을 북카페 운영

Ⅸ

소 요 예 산

서울도서관 교부 예산 : 50,000천원 (※ 2013년 12월 교부완료)

시 설 비 : 30,000원 (설계, 리모델링 공사비 중 일부)

운 영 비 : 20,000원 (관리자 인건비, 카페운영 재료 등)

추가 필요 예산 : 90,000천원

리모델링 공사 및 시설설치 보완 : 30,000천원

- 냉․난방공사, 전기공사, 내부 인테리어, 도서도난방지시스템구축 등

집기비품 구입 및 북카페 시설구축 : 30,000천원

- 가구, PC 등 정보화기기, 빔프로젝트, 오디오, 냉장고, 커피머신 등

도서구입 : 30,000천원 (도서 3,000권)

Ⅹ

행 정 사 항

문화체육과

주민의견을 수렴하여 북카페 조성 세부계획 등 수립 및 시행

- 현장지원센터를 통한 주민의견, 주민 토론회 등 주민의 의견 수렴

- 마을 북카페 주민운영위원회와 지속적인 협의

이촌2동주민센터

마을 북카페 운영을 위한 주민운영위원회 구성

주민운영위원회와 협의하여 운영계획 수립

자치행정과

마을 북카페 설치에 따른 자문