품질시험계획 이행 확인결과

공사명: 지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-12공구)              점검일시: 2021.  8.  31.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·검사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규결별로 세분화하여 시험·검사구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람.
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부자재(철근, 레미콘 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 재산정하고, 누락된 자재(창호, 유리, 난간 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에서 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 변경하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 개구부 주변 노면수 유입 등 상시관리를 요하며, - 측구유입부 및 가설하수관 보호조치를 하였으나 주의 관리요망 ○ 폭우대비 내벽 확인 천공부 보호 및 벽체 절단 작업기간 사전 보완대책 강구 후 시행바람. ○ 굴착 완료 단계이나 벽체제거(본벽, 추가노출벽)시 가시설 저촉우려되니 단계별 시공계획을 수립하고 보강조치 후 후속공정 추진하고, - 2단 수직보강 지지파일 축선관리 및 상부 가로보 스티프너 보강 고려요망 ○ 추가 노출 구조물로 시공성 저하와 공정지연 우려되므로 현장 상황에 적합한 정밀시공 계획수립 등 보완공정 계획 필요함.	별첨 사진 참조