설 계 용 역  과 업 설 명 서

〔서울애니메이션 센터 서비스 강화를 위한 패밀리존 조성 실시설계 용역〕

2017. 4.

서울산업진흥원

1. 과   업   명 : 서울애니메이션센터 패밀리존 조성 실시 설계용역

2. 과업의 목적 : 서울애니메이션센터내 전시공간을 시민들의 니즈에 맞춘

패밀리존으로 구축하여 ‘기업과 창작자’에게 홍보기회를 제공하고, ‘시민과

관광객‘에게는 여가와 체험을 즐기는 공간으로 설계하고자 함.

3. 과업의 범위

가. 본 과업은 “서울애니메이션 센터 위한 패밀리존 공사 실시설계 용역 (사전조사,

기본계획, 기본설계 및 실시설계)과 기존시설물의 철거에 대한 사항을 적용한다.

나. 과업의 범위는 기존시설물 철거, 건축, 인테리어의 기본계획, 평면계획 도면

작성, 실시설계 등 총망라한 도서 일체를 설계하며  타분야(기계, 전기)와의

협력 진행 협의를 총괄한다.

다. 공사 시공시 필요한 일체(기존 시설물 철거 포함)의 용역설계를 그 범위

하되, 이에 수반되는 조사 및 각종 협의, 심의에 필요한 도면과 구비 서류

기타 본 용역에 관한 각종보고 및 제출자료와 기타 감독관이 필요하다고

인정하여 지시하는 일체의 사항을 이행한다.

라. 납품기한

○ 기본설계 : 기본설계도 확정시(사전조사 포함)

○ 실시설계 : 계약 일로부터 14일 이내

4. 위치 및 규모

가. 위  치

시 설 명	위 치	규 모	사업면적(㎡)	비고
서울애니메이션센터	서울시 중구 소파로 126 (예장동 8-145)	1층 전시실(195m2)	약 195㎡

나. 요구실 개요

층 별	요구실
1층	테마전시실 (바닥면적 110m2)
1층	기획전시실 (바닥면적 85m2)

‘

※ 특기사항

- 설계 시 재활용이 가능한 설비 등은 반드시 재활용이 가능한 방향으로           설계에 반영할 것.

5. 일반사항

가. 설계용역사업수행계획서 제출

- 용역수임자(이하 “계약대상자”이라 칭함)는 과업수행 전 설계 진행에 관한

사업 수행계획서 (공정계획포함)를 작성하여 서울산업진흥원 경리관(이하

“발주부서”이라 칭함)에게 제출하고 “발주부서”의 승인 및 필요한 지시를 받는다.

나. 진행보고

- 계약대상자는 설계진행 중 다음 사항을 이행하여야 한다.

1) 기본설계 완료보고 : 기본설계를 완료하였을 때(단, 계약 일로부터 7일 이내)

2) 실시설계 중간보고 : 설계공정 80%일 때

3) 수시 보고 : 발주부서가 지정한 감독관(이하 감독관이라 칭함)의 요청이          있을 때 계약대상자는 위 보고의 각 단계에서 보고내용 승인을 얻은 후

다음 단계에 착수한다.

다. 설계변경 및 조정

- 설계진행 중 발주부서가 필요하다 인정되어 설계내용 변경 또는 수정을           요할 시 계약대상자는 정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없으며 지체 없이

이행하여야 한다.

이로 인한 계약금의 증감은 없다.(중대한 변경은 제외)

라. 감  독

- 계약대상자는 모든 설계과정에서 감독관의 지시 감독을 받아야 한다.

마. 관계법령 준수

- 계약대상자는 설계내용이 건축법, 전력기술관리법, 소방법, 주차장법 등 제반

관련법규에 저촉되지 않도록 하여야 한다.

바. 자료제출 등

- 계약대상자는  발주부서가 필요하다고 인정하여 과업 도중이나 준공 후 요구하는           자료의 제출이나 출석명령에 성실하게 응하여야 한다.

사. 설계관련사항

- 계약대상자는 설계 진행상 부득이 계획지침의 일부변경을 하고자 할 때는 사전           에 발주부서의 승인을 받아야 한다.

아. 설계하자

- 계약대상자는 설계상의 중대한 하자로 인하여 재산의 손실 및 인명피해와 기타

공사 진행상 지장(설계변경에 따른 공기연장 등)을 초래할 시는 이에 대한

모든 책임을 진다.

자. 업무내용 비밀유지

- 계약대상자는 업무수행과 관련한 일체사항을 발주부서의 승낙 없이 임의로 누설           하여서는 안 된다.

차. 기타 본 설명서에 명기가 없거나 의문이 있는 사항은 감독관과 협의하여           감독관의 지시에 따른다.

6. 성과품 제출

가. 기본계획 설계

1) 현황조사서 도면 1부

2) 기본계획 디자인(안),

나. 실시설계

1) 설 계 도 : 유인물(A3) 5부,

2) 시방서(특기시방 포함) 5부.

3) 공사비내역서(일위대가 포함) 5부.

4) 수량산출조서, 가격조사서  각 5부.

5) 공사예정 공정표 1부

6) CD 1부(설계도서 및 내역서 일체)

7. 설계도서의 작성기준

가. 일반사항

1) 도면의 규격은 A3 이며 감독관이 지정한 인쇄된 제도용지를 사용하           고, 규격이 다른 경우 승인을 득한 후 사용한다.

2) 단위는 일체 미터법으로 표기하고 C. G. S 단위로 표시한다.

3) 숫자는 일체 아라비아 숫자로 표기한다.

4) 문자는 한글 사용을 원칙으로 하되 필요에 따라 영문(대문자)이나 한자          를 괄호안에 명기할 수 있다.

5) 약자는 영문에 한하여 보편적으로 사용되는 범위 내에서 사용하되 반드          시 약자 해설집을 목록 란에 명기하여야 한다.

6) 각 실의 명칭, 면적 및 부호는 해당 실에 직접 기입하여야 한다.

7) 감독관이 지정한 도면 외는 일체 채색하지 않는다.

8) 도면 표기방법, 도면번호 등의 규정은 건축, 토목, 기계, 전기, 조경 등 제           반규정에 준하고 감독관과 협의하여 통일을 기한다.

나. 작성요령

1) 설계도 및 설계 원도

가) 설계계획서 및 기본 계획의 확정 후 각 분야별로 공사시공이 가능              하도록 세부적이고 규격화된 일체의 도면을 작성한다.

나) 순서에 의하여 철하고 감독관이 지정한 규격으로 제본한다.

다) 본 과업설명서에 명기가 없는 내용은 “설계도서 작성기준에 따른              다.

2) 시방서

가) 시방서는 일반시방서와 공사시방서로 구분 작성하되, 공사시방서에               는 사용 하는 각종 재료의 규격, 품질, 등급, 색상 등을 명기할 것.

나) 일반시방서는 건설교통부 제정 표준시방서에 준하여 구분 작성한              다.

다) 시방내용은 전 공정을 각 분야별 공정 순으로 분류 작성한다.

라) 설계도면에 기재되지 않는 일반사항과 특수시공을 요한 것은 특기              방서에 차질 없이 상세히 기입하여 각 분야별 공정한계를 분명히 기              재하여야 한다.

마) 특기시방서는 각종 재료의 규격, 품질, 등급, 색상 등을 명기해야              하며 의장색체 계획도 아울러 제시하여야 한다.

3) 공사비 내역서

가) 모든 설계작성은 국토해양부 지정 표준품셈에 의한다.

나) 일위대가 적용은 건설표준품셈에 준하여 작성하되 내역서에 첨부하여                철한다.

다) 물가시세표에 표기되지 않는  품목은 생산업체의 원가조사서가 첨부된               견적서 3개 이상 물가정보지의 가장 낮은 단가를 적용한다.

라) 물가시세표에 표기되지 않은 품목은 생산업체의 원가조사서가 첨부된 견적               서 3개 이상에 의거하되 가장 낮은 가격을 적용한다.

마) 내역서 작성은 공사작업 및 시방서 순으로 작성하여 각 분야별로 산              출하여 감독의 지시에 의거 내역을 작성한다.

4) 물량산출조서

가) 수량산출은 국토해양부 제정 적산기준에 의하여 산출하되 내역서 공정               과 동일하게 작성한다.

나) 주요자재 수량은 별도 집계조사 작성한다.

5) 공사예정 공정표

가) 착공예정일을 기준 절대공기를 계산하여 주 공정 순으로 작성한다.

나) 건축, 기계, 전기, 음향, 통신 등 총괄공정표로 작성 한다. 끝.