문서번호	감사담당관-11151		결재	주무관	감사팀장	감사담당관
시행일자	2016.12.8.
접수번호	토목과-14691
수 신 자	수신자참조

일상감사의견서[2016년 이면도로 포장 및 정비공사(단가계약)-설계변경]

의 뢰 일

2016. 12.06.

의뢰번호

토목과 - 14580호

감 사 자

직 급 : 시설 7급                     성 명 : 오 병 수

사 업 명

2016년 이면도로 포장 및 정비공사(단가계약)-설계변경

1. 사업개요

가. 위  치: 성동구 관내 전지역

나. 도급(계약)금액

- 당초금액:  847,550,000원

- 변경금액: 1,090,980,000원 (증 245,223,000원)

다. 사업기간: 2016. 3. 2. ~ 2016. 12. 31.

라. 설계변경 주요내용

- 신규공종 발생 및 공종별 목적물량 증감

2. 일상감사 결과

(단위: 원)

구 분	심사금액	조정금액	절 감 액	절 감 률
도급비	1,090,980,000 (증 245,223,000)	1,090,980,000 (증 245,223,000)	-	-%

3. 주요심사 내용

○ 설계변경 타당성 여부

■ 본 공사는 성동구 관내 노후된 아스팔트 및 콘크리트 도로를 정비하여 안전사고를 예방하고 주민 불편사항을 신속히 해소하는 사업으로

■ 공사 추진 시 타부서 협조사항 및 시비 예산 지원 등에 따른 신규공종 발생 및 공종별 목적물량 증감 등의 사유로 인해 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정됨.

○ 기 타 사 항

■ 보험료 및 산업안전보건관리비, 환경보전비 등 사후 정산 철저

■ 심사금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 경제적인 공법과 단가 등을 자체 조정하시기 바람

■ 『2016년 일상감사·계약심사 운영계획』에 따라 일상감사 조치결과를 통보받은 날로부터 10일 이내에 “조치결과 통보서(전체서식참조)”를 통보하시기 바람

※ 일상감사 의견에 이의가 없는 경우, 조치결과 통보 생략가능

대시민공개		감사담당관
수신자	재무과장,토목과장