[붙임 3]

일상감사 의견사항 조치내용

수    신 : 감사담당관                              2017. 12.   .

사 업 명	2017년 구 소규모 편익시설 설치 공사(연간단가)
1. 사업개요 가. 사 업 명 : 2017년 구 소규모 편익시설 설치공사 나. 사업기간 : 2017. 3. 31 ~ 2017. 12. 31 다. 사 업 비 : 금1,497,000천원 라. 사업개요 - 아스팔트 포장 : A = 172a → A = 203a (증 31a) - 콘크리트 포장 : A = 9a → A = 2a (감 7a) - 기타(제설 작업) 1식 마. 설계변경사유 : 단순 물량증감 및 신규공정에 따른 설계변경
2. 감사자 조치의견 ▶ 내역서 조정 ○ 보도블록(고압블록)포장의 단가산출이 부적정하니 검토 후 시행할 것. - 소형고압블럭하차 : 270㎡ → 108㎡
3. 조치내용(불채택시 그 사유) ○ 내역서 조정하여 반영함.
4. 관계자료 및 기타 첨부자료

2017 년   12월     일

부서장 : 소속 도로과       직급(위)  과장           성명 최 광 천 (인)