일상감사 의견서

수신 : 치수과                                  2021.12. 13 .

접수번호

2021-148

업무주관

부 서

치수과

담 당

시설7급 강충구

사업명

2021년 하반기 하천 유지관리 공사 (연간단가)-설계변경

감  사  개  요

1. 사업개요

- 공 사 명 : 2021년 하반기 하천 유지관리 공사 (연간단가)-설계변경

- 공사기간 : 2021. 10. ~ 2022. 2.

- 공사위치 : 관내 하천 (중랑천, 우이천, 성북천, 정릉천, 배밭골천)

- 공사규모 : 하천 및 하천시설물 유지관리 등

- 소요예산 : 624,452,000원

2. 변경개요

가. 변경사유: 공사물량 증·감에 따른 수량 변경 및 제설대책 반영 등

나. 공사비 변경 내역

구 분		당 초	변 경	비 고
총공사비		313,104,050	693,590,320	증 380,486,270
도급액	공급가액	284,640,046	567,683,637	증 283,043,591
	부가가치세	28,464,004	56,768,363	증 28,304,359
	계	313,104,050	624,452,000	증 311,347,950

감사결과 조치의견

□『2021년 하반기 하천 유지관리 공사 (연간단가)-설계변경 』건에 대한  일상감사 결과를 아래와 같이 통보하오니 참고하시기 바랍니다.

▶ 설계변경금액 :624,000,000원(신규대가제82호표 인력터파기조정)

▶ 일상감사 의견 : 신규일위대가 설계금액 변동 및 준공시 산업안전보건

관리비·환경보존비 계상기준을 정확하게 체크하여 준공정산 바람

▶ 기타 참고사항

○ 향후 사업별 목적·용도 및 추진계획 등을 구체적으로 확정하여 예산편성범위내 집행에 만전을 기하여 주시기 바람.  끝.