<설계변경>

일상감사 및 계약심사 조정내역 사유서

□ 공 사 명 : 2019년 차도유지보수공사(연간단가)

□ 사업개요

위 치	중구 관내
사업내용	우리구 차도의 노후 및 파손, 균열, 요청 등 포장상태가 불량한 이면도로를 신속히 정비하여 주민불편 사항을 최소화하고 안전사고 예방을 위한 공사임.
사업기간	2019. 3.13. ~ 2019.12.31.

□ 심사평가 결과

○ 요청금액 :   697,391천원

○ 조정금액 : 1,205,000천원

○ 증액금액 :   507,608천원

○ 증 가 률 :     + 87.38%

□ 설계변경 사유

○ 추가공사 시행에 따른 변경

○ 기타 수량증감에 의한 변경 등

□ 주요 심사내용

○ 수량 증가에 따른 설계변경에 대한 사업의 적정성 등 여부 → 별도의견 없음

□ 기타사항

○ 계약관련법 등에 따라 절차 이행 규정 준수 철저

○ 원가심사에 따른 단가산출 등 물량 재확인 후 설계변경 실시

○ 심사한 금액보다 원가를 더 절감할 수 있는 경우 자체 반영

○ 사업이 완료된 이후에 정산시 철저를 기하기 바라며,

○ 공종별 물량확인을 철저히 하여 사업비가 과다 지급되는 일이 없도록 하기 바람