감 리 검 토 의 견 서

공 사 명	강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사	관련공문	임광(강남)제2014-583호 (2014.12.22.)
제 목	자동차전용도로 및 교량하부 메쉬휀스설치 실정보고 검토보고	검토일자	2014. 12.

□ 개 요

자동차전용도로에 사람이나 동물의 도로무단횡단으로 인한 교통사고 방지, 교량하부에      무단주차나 불법사유시설물 설치로 인한 화재방지 등을 위하여 설치하는 메쉬휀스 실정      보고의 적정성 검토.

□ 평면도 및 추진경위

1) 평면도

2) 추진경위

⦁ 자동차전용도로에 사람.동물 및 기타용구에 의한 무단횡단 및 접근 등이 많아 교통사고      의 위험이 있거나 있을 것이라고 판단되는 구간은 접근방지시설을 설치하고, 필요한 때      에는 도로부지 경계에 울타리 등을 설치하여 사람 등의 접근을 금지시켜야 함.

<자동차전용도로 지정에 관한 지침(국토교통부) 제12조(도로안전시설 등)>

⦁ 2010년 12월 13일밤 서울외곽순환고속도로 중동나들목 인근 교량하부 불법주차장에서      발생한 유조차 화재로 인해 차량 37대가 전소되고, 교량의 하부구조가 취약해져 복원에      3개월이 걸렸으며, 2280억여원에 이르는 경제적 손실을 초래함.

□ 검토내용

1) 실정보고 사유

⦁ 자동차전용도로의 사람이나 동물의 접근방지로 교통사고 방지

⦁ 교량하부 무단주차차량 및 불법사유시설물의 화재로 인한 교량손실 방지

2) 문제점

⦁ 당 실정보고는「공사계약 일반조건 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)」사항       으로 계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우임.

3) 대책검토

⦁ 자동차전용도로에서 사람이나 동물의 도로무단횡단으로 인한 인명사고나 차량추돌사고       등 대형사고를 미연에 방지하고, 교량하부 불법주차 및 사유시설물의 화재 등을 방지       하기 위해 메쉬휀스 설치가 필요함.

4) 주요수량

공 종	단위	당 초	변 경	증·감	비고
메쉬휀스(H2.0m×W2.0m)	경간	-	961	961	1경간/2m
출입문(H2.0m×W1.0m)	개소	-	6	6

5) 적용단가 검토

⦁ 공사계약 일반조건 제20조에 따른 신규비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 하여       산정한 단가에 협의율(82.25%)을 곱한 금액으로 적용.

6) 공사비 증․감 현황

(단위 : 원)

비 목	당 초	변 경	증·감	비고
총공사비	-	227,000,000	227,000,000
순공사비	-	179,601,722	179,601,722
제 잡 비	-	47,398,278	47,398,278

□ 검토의견

1) 자동차전용도로에 사람이나 동물의 무단횡단 및 접근방지로 인명사고나 차량추돌사고       등 대형사고를 미연에 방지하고, 교량하부 불법주차 및 사유시설물 화재로 인한 교량       손실 방지 등을 위해 메쉬휀스를 설치함이 타당한 것으로 사료됨.

2) 메쉬휀스 설치를 위해 산출한 수량, 단가, 공사비에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로       판단 됨.

3) 산정된 공사비는 추후 설계 변경시 반영하고자 함.

확 인 자	강남순환 도시고속도로(4공구) 전면책임감리용역 책 임 감 리 원 장 경 식