자문 검토 의견서

○ 돈화문로 도성한복판 주요 가로 개선 사업

안 건	검 토 의 견	조치결과
돈화문로 도성한복판 주요 가로 개선사업	1. 보도교체 포징공사(1,2,3,4,9,10단계)야간 공사 후 주간시간 통행시 보차도경계석 및 빗물받이 설치로 인한 차로 운영이 도면에 표시된 내용으로 시행이 가능한지 재검토	수용
	2. 4단계 공사 시 우회전을 위한 도로 set-back구간의 점용은 직선도로와 동일하게 점용하는 방안 검토	수용
	3. 차도석재포장공사(5,6,7,8딘계) □ 포장 상세 단면도 제시 □ 공사방법 및 내용을 재확인하여 교통처리도면에 명확하게 표시(“예” 5단계에서 공사상세도에서는 1일 15m를 공사하는 것으로 제시하고 공사내용에서는 콘크리트 양생기간이 5일 필요한 것으로 되어 있으며 공사기간은 7일로 표시되어 있어 점용방법과 공사방법 및 내용이 상이) - 콘크리트 양생, 포장 등을 고려 단계별 전체 구간이 시행되는 경우 통행방법에 대한 재검토 시행(일방통행, 우회도로 확보 등) - 15m씩 콘크리트 양생, 포장 등을 시행하고 이동하는 경우 전일점용에 따른 교통통제수 운영계획을 별도 제시 □ 5단계에서 시점부 안전지대를 좌회전과 우회전 차량을 위한 차로 활용 방안 검토	수용
	4. 당초 공사시점부 차로 운영은 3.2, 2.8, 3.0의 3차로로 구성되어 있으나 포장 후에는 2.3, 3.0, 3.0의 3차로로 운영하는 것으로 게획되어 있어 3차로 운영이 어려운바 이에 대한 대책제시	수용
	5. 공사완료 후 도면을 제시하기 바람	수용
	6. 작업구간 내 임시보행공간 설치방안을 구체적으로 제시하기 바람	수용
	7. 교차로 부 공사 시 차량운영계획이 단계와 상이하므로 수정하기 바람(5·6단계	수용
	8. 공사 중과 후 가로수 및 식수대의 처리방안을 제시하기 바람	수용
	9. 공사 중 B-B' 단면의 차로 폭을 수정하기 바람(9단계)	수용
	10. 종로3가역 입구 교차로 동서방향 차로에 접한 보도교체 공사 시 회전차량과 도로 폭을 고려한 계획이 필요함(9·10단계)	수용
	《 사전검토보고서 관련 공통사항 》 ① 교통처리계획도는 현황도 공사 총괄도 단계도 순서로 정리하기 바라며, 교통소통 대책 수립 대상이 2개 이상일 경우, 지점별로 구분하여 작성하기 바람 ※ 도로점용구간을 중심으로 횡단도를 제시하기 바람 ② 본보고서로 제출한 공사개요, 교통현황 및 분석, 교통영향분석, 문제점 및 개선방안, 홍보계획 등을 사전검토에 따라 보완하여 모두 재제출하기 바람 ③ 버스정류소 주변 공사의 경우, 버스정류소 운영 노선현황을 조사 제출하기 바람 ④ 보도점용 공사는 보행량 조사 및 보행 서비스수준 분석 결과를 제출하기 바람 ⑤ 공사안내표지판은 문자 검토가 가능하도록 교통처리계획도를 작성하기 바라며, 현 시점의 서울시 로고를 반영하기 바람 ⑥ 본 용역(도로점용공사장 교통소통대책 용역)에 대한 계약서를 제출하기 바람	수용