제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2017년 6월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 760m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2019.11.30
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			시점부 지하차도 임시측도 개설			요청금액		증 328,700천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등) 민원해결, 보수, 보강 제도, 기준변경 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 강남순환도로 개통으로 시점부 성산,수서방향 임시측도를 개설함에 따라 지하차도 가시설 좌,우 성토제체의 안정성을 확보를 위해 가시설 앵커를 보강하여 성토제체의 안정성을 증대함으로써 통행중 차량의 안정성을 확보하고 교통안전시설물을 설치하여 통행차량의 안전에 만전을 기하고자 함.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 실정보고 건수마다 협의 근거 첨부바람 ○ 가시설 계측 및 배수시설은 기존 시설 사용을 검토바람 ○ P114 안전시설물 이미지 방지턱 수량누락으로 보완바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2017년 06월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 829m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001.12.29 ~ 2019.11.30
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			광명시 재활용품선별장 복구공사			요청금액		증 122,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			현장여건 상이(지질, 용수 등) 민원해결, 보수, 보강 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 소하JCT DOWN RAMP-A 및 서해안고속도로 접속부 시공에 따른 훼손된 기존시설물 원상복구 필요.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ P16 수목제거는 서울시 조경공사 설계대가 적용 검토바람 (B8이하 21,601원/주 →14,119원, B20 73,339원/주→63,247원) ○ P18, 19단가 조견표중 보차도경계석 단가에 표준시장단가가 있으므로 협의율 82.25%가 아닌 100%적용을 검토 바람 ○ P51∼59시공상세도 도면 규격란에 단위를 규격으로 변경하기 바람 ○ P35 아스콘 포장면적 검토, 수정바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호			요청부서	토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	서울역 7017 프로젝트 건설공사
공사개요	공사규모	- 고가도로 보수 ·보강, 그린웨이 조성 등 : B=10.3m, L=1,235m - 바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m
	공사기간	2016. 04. 18. ~ 2017. 10. 31.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아, (주)신명건설기술공사, (주)진전기엔지니어링, 해주엔지니어링(주)
	설 계 사	(주)종합건축사사무소 디자인캠프문박디엠피, (주)한국종합기술, (주)삼안
	시 공 사	홍익산업개발(주), (주)동원개발
자문 안건명		계단 논슬립 설치비 정산				요청금액		증 57,860천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 연결로 4개소 계단에 보행자의 안전을 위하여 논슬립을 설치하였으며 논슬립 하부에 경관조명(띠조명)을 설치하기 위하여 현장여건에 적합하게 제작 및 설치한 것에 대한 공사비 반영(정산)
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 논슬립테이프 선정기준 검토바람(내구성 등 시험하여 선정) ○ P45 자재단가는 전문가격조사기관 3개 비교검토하기 바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호			요청부서	토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	서울역 7017 프로젝트 건설공사
공사개요	공사규모	- 고가도로 보수 ·보강, 그린웨이 조성 등 : B=10.3m, L=1,235m - 바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m
	공사기간	2016. 04. 18. ~ 2017. 10. 31.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아, (주)신명건설기술공사, (주)진전기엔지니어링, 해주엔지니어링(주)
	설 계 사	(주)종합건축사사무소 디자인캠프문박디엠피, (주)한국종합기술, (주)삼안
	시 공 사	홍익산업개발(주), (주)동원개발
자문 안건명		난간하부 보강재 설치비 반영				요청금액		증 141,790천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 보도용 난간 하부와 연석사이의 공간으로 고가 내부의 이물질이 바람 등 외부 작용으로 고가 하부로 낙하하는 것을 방지하기 위하여 설치한 난간 하부 보강재 공사비 반영
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ P39 일위대가 1호표의 ‘난간설치’품에 대한 단가산출 No.4 자료 첨부바람 ○ 하부보강 파이프 사용 가능 여부(Steel 아연) 검토바람 ○ P40 자재단가는 전문가격조사기관 3개 비교 검토바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		방재시설부	요청일		2017년 7월 일
공 사 명	양재대로 녹지연결로 조성공사
공사개요	공사규모		녹지연결로 폭 20m, 총연장 90.65m
	공사기간		전체 2016.06.20.~2017.10.30., 2차 2017.01.13.~2017.10.30
	감 리 사		(주) 제일엔지니어링외 2개사
	설 계 사		(주)유신외 1개사
	시 공 사		우륭건설(주)
자문 안건명			토취장 및 사토장 선정			요청금액		113,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 현장여건 상이(지질, 용수 등)\
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 원 설계 토취장 및 사토장은 운반거리만 명시되고 구체적 위치가 지정되지 않았음 ‘ 토석정보공유시스템과 현장조사를 통한 인허가 및 운반거리, 경제성 등을 검토하여 선정 ‘ 당초 설계인 덤프(15ton)를 덤프(24ton)으로 변경하여 공사비를 산정 교대 터파기 사토설계수량이 누락되어 반영
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 단가협의 결과 첨부하기 바람 ○ 보강토 사용 양질토사 품질기준 첨부 바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2017년 7월 일
공 사 명	광복교~안양교 도로확장공사
공사개요	공사규모		광복교 주변 도로확장 : 총연장 L=310m (5차로→6차로) 안양교 확장 : 총연장 L=300m (4차로→6차로) 부대공 및 조경공사 1식
	공사기간		2016. 04. 01 ~ 2019. 09. 12
	감 리 사		(주)동부엔지니어링 외 2
	설 계 사		(주)경동엔지니어링 외 2
	시 공 사		(주)케이씨씨건설
자문 안건명			신구로펌프장 외부수문 인입관로 이설			요청금액		증118,493천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 현장여건 상이(지질, 용수 등) 문화재 및 지장물 이설
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 안양교(구로Ic방향) 철거 중 신구로펌프장 외부수문 인입관로가 교량에 첨가되어 있음을 발견 하고 유관기관과의 이설 협의 결과, 오류IC방향 교량으로 임시 이설한 후 안양교 최종 복구 시 구로구와 협의 하는 것으로 설계변경
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 제어 케이블 설치에서 P44 내역서의 재료비와 일위대가의 재료비가 불일치하므로 조정 바람 ○ 전기분야 기술지원기술자 및 설계자의견 첨부 바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		방재시설부	요청일		2017년 7월 일
공 사 명	잠원2 빗물펌프장 신설공사
공사개요	공사규모		□ 자연방류관로 L=640M □ 조경공사: 1식 □ 가동보 1개소, 수문2개소
	공사기간		2013. 01. 03 ~ 2018. 2. 28
	감 리 사		㈜신명건설기술공사 외 2개사
	설 계 사		㈜한국종합기술, ㈜현대엔지니어링
	시 공 사		에스트건설㈜
자문 안건명			강남역 역경사관로 개선 1식			요청금액		6,553,803천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			사업계획 변경(정책, 계획변경 등)
설계변경사항(요약) ○ 내용 :강남역 8번출구 주변 장기간 방치되고 있는 기형적 하수관로의 정상화를 위한 관로부설, 지하철 8번출구 이설, 지하상가 재배치, 기타부대공 및 지장물 이설 등
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ P35,37 품질관리활동비, 사무실임대료 12개월 반영바람 ○ 가시설(주야간) 노무비 할증 25%로 조정을 검토 바람 ○ 내역서 P30 노면복구 및 흙막이공 H-Pile박기 주간(측면말뚝), 야간(중간말뚝) 구분 근거 첨부바람 ○기술지원기술자 검토의견 첨부바람 ○ 하수박스 단면 및 선형 변경시 변경 심의를 거쳐야 하는지 확인바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사
공사개요	공사규모		- 여의도 진입램프 : 총연장 712m(교량 L=235.0m,옹벽 477m) - 올림픽대로 이설 : 1차로 980m
	공사기간		2016.11.30. ~ 2018.11.29.(24개월)
	감 리 사		㈜천일, ㈜한맥기술, 케이에스엠기술㈜
	설 계 사		㈜건화, ㈜도화엔지니어링
	시 공 사		케이월드종합건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			가설휀스 설치			요청금액		증162,400천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 올림픽대로구간 지장수목이식 및 제거, 토공사 진행시 가설휀스를 설치하여 민원발생방지, 통행차량안전 등의 목적으로 사용하고자 함.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 「올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사」의 지장물 이설 등에 관한 관계기관의 협조 요청사항 및 통행차로의 안전확보를 위하여 가설휀스를 설치하여 공사를 시행함이 타당함.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ P21 가설휀스 손료산정(3개월, 15개월)에 대한 공사기간 산출근거가 없으므로 공사기간 명기 바람 ○ 가설휀스 재사용가능 여부 검토바람 ○ 협의율 조정 서류 보완하기 바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사
공사개요	공사규모		- 여의도 진입램프 : 총연장 712m(교량 L=235.0m,옹벽 477m) - 올림픽대로 이설 : 1차로 980m
	공사기간		2016.11.30. ~ 2018.11.29.(24개월)
	감 리 사		㈜천일, ㈜한맥기술, 케이에스엠기술㈜
	설 계 사		㈜건화, ㈜도화엔지니어링
	시 공 사		케이월드종합건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			지하철5호선 계측관리 및 안전점검 추가			요청금액		증 163,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 서울특별시 도시철도공사와 지장물 이설협의결과 의견회신에 따라 열차 안전운행 및 철도시설 보호, 착공전 보완서류 제출 요구가 있어 이에따라 계측관리 및 안전점검을 추가하여 원활한 공사진행을 기하고자 함.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 「올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사」 중 열차 안전운행 및 철도시설 보호를 위한 서울시 도시철도공사의 의견사항을 반영하여 계측 및 안전점검을 실시함이 타당함.
자문결과 : 원안가결 ※ 원설계자 및 기술지원기술자 의견 첨부바람

제9차 설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사
공사개요	공사규모		- 여의도 진입램프 : 총연장 712m(교량 L=235.0m,옹벽 477m) - 올림픽대로 이설 : 1차로 980m
	공사기간		2016. 11. 30. ~ 2018. 11. 29.(24개월)
	감 리 사		㈜천일, ㈜한맥기술, 케이에스엠기술㈜
	설 계 사		㈜건화, ㈜도화엔지니어링
	시 공 사		케이월드종합건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			보도가교 설치			요청금액		증 487,600천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 공사구간이 올림픽대로와 노들길 사이에 위치하고 있어 작업자 및 현장관계자의 공사장 접근이 곤란하여 보도가교를 설치하여 작업자의 안전을 도모하고자 함.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 「올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사」의 작업중 근로자의 공사장 접근을 용이하게 하고 안전을 도모코자 보도 가교 공사를 시행함이 타당함.
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ P111, 114견적서 수신을 발주처 또는 감리단으로 수정 바람 ○ P183 보도가교 단가산출서 2항 인건비 철골가공 및 조립량 적용하고 수량산출서와 중량에 차이가 있으므로 수정검토 바람 ○ P197 토류판 설치 및 철거 표준시장단가 검토 바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사
공사개요	공사규모		- 여의도 진입램프 : 총연장 712m(교량 L=235.0m,옹벽 477m) - 올림픽대로 이설 : 1차로 980m
	공사기간		2016. 11. 30. ~ 2018. 11. 29.(24개월)
	감 리 사		㈜천일, ㈜한맥기술, 케이에스엠기술㈜
	설 계 사		㈜건화, ㈜도화엔지니어링
	시 공 사		케이월드종합건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			올림픽대로 확장구간 사면처리공법 변경			요청금액		증 388,500천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			민원해결, 보수, 보강 공법변경(신기술, 신공법 포함)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 차집관거(2련@3mx3m)및 수목 등 녹지대 시설물 유지관리도로 존치를 위한 따른 올림픽대로 확장구간 사면처리 공법변경(흙쌓기→옹벽)에 대하여 검토 보고함.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 「올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사」의 유지관리기관과 협의한 결과, 흙쌓기로 인한 수목 훼손 면적을 최소화 하고, 차집관로 및 시설물 유지관리도로 존치를 위해 옹벽을 시공함이 바람직하다고 판단됨.
자문결과 : 원안가결 ※ 흙쌓기 비탈면 구배에 대한 안정성 검토

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호		요청부서		토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사
공사개요	공사규모		- 여의도 진입램프 : 총연장 712m(교량 L=235.0m,옹벽 477m) - 올림픽대로 이설 : 1차로 980m
	공사기간		2016. 11. 30. ~ 2018. 11. 29.(24개월)
	감 리 사		㈜천일, ㈜한맥기술, 케이에스엠기술㈜
	설 계 사		㈜건화, ㈜도화엔지니어링
	시 공 사		케이월드종합건설㈜ 외 3개사
자문 안건명			케이블이설(임시 이설분) 추가			요청금액		증 118,000천원
자문요청사유			5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			문화재 및 지장물 이설
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 서울시설관리공단 지장물이설 협의결과 당 현장 수목이식 및 토공사의 원활한 추진을 위해 지장물(광케이블 및 전기선로 등)이설이 불가피함.
감리단 의견(요약) ○ 내용 : 서울시설관리공단 지장물이설 협의결과에 따라 원활한 공사추진과 시설물 보호를 위하여 광케이블 및 전기선로 지장물 이설은 조속히 이루어져야 함.
자문결과 : 원안가결