제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호			요청부서	토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	서울역 7017 프로젝트 건설공사
공사개요	공사규모	- 고가도로 보수 ·보강, 그린웨이 조성 등 : B=10.3m, L=1,235m - 바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m
	공사기간	2016. 04. 18. ~ 2017. 10. 31.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아, (주)신명건설기술공사, (주)진전기엔지니어링, 해주엔지니어링(주)
	설 계 사	(주)종합건축사사무소 디자인캠프문박디엠피, (주)한국종합기술, (주)삼안
	시 공 사	홍익산업개발(주), (주)동원개발
자문 안건명		계단 논슬립 설치비 정산				요청금액		증 57,860천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 연결로 4개소 계단에 보행자의 안전을 위하여 논슬립을 설치하였으며 논슬립 하부에 경관조명(띠조명)을 설치하기 위하여 현장여건에 적합하게 제작 및 설치한 것에 대한 공사비 반영(정산)
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ 논슬립테이프 선정기준 검토바람(내구성 등 시험하여 선정) ○ P45 자재단가는 전문가격조사기관 3개 비교검토하기 바람

제9차 설계변경 소위원회 자문결과

문서번호			요청부서	토목부	요청일		2017년 07월 일
공 사 명	서울역 7017 프로젝트 건설공사
공사개요	공사규모	- 고가도로 보수 ·보강, 그린웨이 조성 등 : B=10.3m, L=1,235m - 바닥판 재설치(본선) : B=10.3m, L=516.5m
	공사기간	2016. 04. 18. ~ 2017. 10. 31.
	감 리 사	㈜진우엔지니어링코리아, (주)신명건설기술공사, (주)진전기엔지니어링, 해주엔지니어링(주)
	설 계 사	(주)종합건축사사무소 디자인캠프문박디엠피, (주)한국종합기술, (주)삼안
	시 공 사	홍익산업개발(주), (주)동원개발
자문 안건명		난간하부 보강재 설치비 반영				요청금액		증 141,790천원
자문요청사유		5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		민원해결, 보수, 보강
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 보도용 난간 하부와 연석사이의 공간으로 고가 내부의 이물질이 바람 등 외부 작용으로 고가 하부로 낙하하는 것을 방지하기 위하여 설치한 난간 하부 보강재 공사비 반영
자문결과 : 조건부가결 ❑ 자문의견 ○ P39 일위대가 1호표의 ‘난간설치’품에 대한 단가산출 No.4 자료 첨부바람 ○ 하부보강 파이프 사용 가능 여부(Steel 아연) 검토바람 ○ P40 자재단가는 전문가격조사기관 3개 비교 검토바람